투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(3공구) 변경계약 의뢰(총괄11회, 6차 1회)

1. 도시철도사업부-10755호(2021.12.02.)와 관련입니다.

2. 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(3공구)의 감리원 투입계획 변경 및 물가변동금액 반영으로 인한 용역기간 및 계약금액이 변경되어 다음과 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(3공구)

나. 계 약 자 : ㈜수성엔지니어링, ㈜동일기술공사, ㈜백림종합건축사사무소

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄	2011.11.01. ~ 2022.03.07.	2011.11.01. ~ 2022.06.28.	113일 연장
6차	2021.04.25. ~ 2022.03.07.	2021.04.25. ~ 2022.06.28.

라. 용역금액 조정 내역

(단위 : 원)
구분	당 초	변 경	사 유
총괄 (제11회)	3,484,000,000	3,680,000,000	∘계약기간 : 113일 연장 ∘계약금액 : 증) 196,000천원 ∘변경사유 - 물가변동 및 기간연장 반영
6차 (제1회)	618,960,000	814,960,000	∘계약기간 : 113일 연장 ∘계약금액 : 증) 196,000천원 ∘변경사유 - 물가변동 및 기간연장 반영

마. 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철건설사업, 신림선 경전철 건설, 시설비및부대비, 감리비

(도시철도건설사업특별회계)

붙  임  1. 계약금액 조정 검토보고서 1부

2. 변경 내역서(총괄11회) 1부

3. 변경 내역서(6차1회) 1부

4. 합의각서 1부.  끝.

	도시철도사업부장
주무관	정광욱		공정관리과장	최문기		도시철도사업부장	12/03 이철
협조자	주무관	박노성		재무과장	전성권
시행	도시철도사업부-10817	(		)	접수		(		)
우			/	WWW.seoul.go.kr
전화		/전송	02-772-7305	/		/	부분공개(5)