코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경에 따른 용역계약 변경(장비임차 금액 감액) 의뢰

1. 도로관리과-16856(2021. 12. 3.)호 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진 중인「2021년 서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석」용역 설계변경에 따른 용역계약 변경을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

구 분	용 역 현 황	비 고
계약건명	2021년 서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석
용역기간	’21.05.13. ~ ’21.12.10.
계약자	㈜로드코리아
계약금액	금1,583,000,000원

나. 계약변경 내용(장비 임차료 감액)

구 분	당초금액	변경금액	증․감
계 약 금 액	금1,583,000,000원	금1,542,768,000원	감)금40,232,000
변 경 사 유	당초 사용연장 2,000㎞보다 1,617㎞ 추가사용(총 3,617㎞)

붙임  1. 설계변경 방침서 1부

2. 설계변경 계약의뢰서 1부

3. 설계변경 요청서류(공문/합의서/내역서) 1부.  끝.

	도로관리과장
주무관	김태우		포장조사평가팀장	백종은		도로관리과장	12/03 하현석
협조자	주무관	김원재
시행	도로관리과-16884	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 본청3층 도로관리과	/
전화	02-2133-8137	/전송	02-2133-0765	/		/	부분공개(6)