부 장		12/03 이철		과 장	최문기	심사자	박노성	설계자	정광욱		설 계	심 사		결 재
											2021년 12월 일	2021년 12월 일
변 경 설 계 서(총괄 11회)
	용 역 명 : 서울시 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역 3공구(총괄 11회)
	구 분					당 초				변 경			증.감
	총 용 역 비					3,484,000,000				3,680,000,000			증) 196,000,000
	도급비		공 급 가 액			2,883,100,000				2,990,360,000			증) 107,260,000
			물 가 변 동			248,900,000				310,490,000			증) 61,590,000
			소 계			3,132,000,000				3,300,850,000			증) 168,850,000
			부 가 가 치 세			313,200,000				330,085,000			증) 16,885,000
			손해배상공제료			38,800,000				49,065,000			증) 10,265,000
			계			3,484,000,000				3,680,000,000			증) 196,000,000
< 용역개요 > ○ 총 연 장 : 1,642m (정거장 3개소) ○ 감리기간 : 2011.11.01 ~ 2022.03.07.(변경없음)