문서번호	토목부-22417
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	12/03 임춘근
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사-

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고 (7회)

2021. 12.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고(7회)

「올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 공사」의 책임건설사업관리기술자로부터  물가변동으로 인한 계약금액 조정(7회) 검토보고가 있이 이에 대한 보고임

Ⅰ		관련 근거

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(7회) 검토보고

【올대감 21-336(‘21. 12. 01.)호】

Ⅱ		사업 개요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사위치 : 송파구 풍납동 일대

○ 사업규모

- 램프신설 : L=1,383m (교량 446m 포함)

- 램프이설 : L=1,309m (교량 139m 포함)

- 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21km), 김포방향(L=1.16km)

○ 사업기간 : 전체‘16. 4. 22. ~ ‘22. 12. 31.

○ 총사업비 : ********************************

○ 감리사/시공사 : ㈜이산외 2개사 / ㈜덕일외 2개사

○ 공 정 율 : 80%

Ⅲ		관계법령 및 검토내용

□ 관계법령

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조, 동법시행령 제73조 및 시행규칙 제72조

⦁기간요건 : 계약을 체결한 날부터(2차 이후의 계약금액 조정의 경우에는 직전 조정기준일로 부터) 90일 이상

⦁등락요건 : 입찰일기준으로 100분의 3이상 증감된 경우

◦ [지방자치단체 입찰 및 계약집행기준]제13장.공사관리일반조건(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

⦁준공대가(장기계속계약의 경우는 각 차수별 준공대가) 수령 전까지 조정신청을 해야 조정금액을 지급

□ 계약변경 현황 및 금회ES적용내역

*

□ 검토내용

◦ 물가변동현황 및 금회물가변동[7회] 조정신청 내용

구 분	1회ES	2회ES	3회ES	4회ES	5회ES	6회ES	7회ES	비고
************	****	****	****	****	****	****	****
*************	***********	***********	***********	***********	***********	***********	***********
***********	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
***************	***********	***********	***********	***********	**********	***********	***********

◦ 계약금액 조정요건 검토(기간요건 및 등락요건 동시충족)

- 기간요건 : 직전조정일로 부터 90일 이상(151일) → OK

- 등락요건 : 직전조정일로 부터 100분의 3이상(3.26%)   → OK

**	**** ***	**** ***	**** ****	*** ***	****	**
****	**********	**********	****	*****	***************** *****************

◦ 물가변동 대상금액 검토

- 대상금액 = 조정기준일 당시 산출내역서 – 물가변동 적용제외금액

= 41,544,009,000원 – 33,138,069,230원 = 8,405,939,770원

***	**	****	****	****	****	****	****
**	***	******	******	******	******	******	*****
***	*	***	*****	*****	*****

※ 물가변동 적용제외금액 : 조정기준일 당시 (예정공정, 실행공정, 기성공정) 중 빠른공종(큰금액)

*****************

********

◦ 물가변동 조정율 검토

- 지수조정율 : 3.26% ⇒ 지수조정율 3%이상으로 적용기준 충족함

「지수조정율 산출서」

**	****	**** *******	***** ***	***** ***	*** *****	**
********	********* *******	**************	******	*****	*********
********	********* *******	***********	******	*****	*********
*		**************	******		*****

* 기존공종(K0) : `21.05.01(직전조정일)일로부터 ~ `21.09.30(조정기준일)일까지의 조정률 = 3.28%

* 신규공종(K1) : `21.06.18(설계변경일)일로부터 ~ `21.09.30(조정기준일)일까지의 조정률 = 0.23%

◦ 계약금액 조정내역 검토

***	*******	***
*******************	***************	******* ************
****************	***************	****
**************	**************	*****
*************	*****
*******************	************	*****
*************	*	****
****************	************	*****

Ⅴ		감리단 검토의견

◦ ********************************************************************************************

Ⅵ		조 치 계 획

○ ****************************************************************************************************

붙 임  책임건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.