부 장		12/03 이철		과 장	최문기	심사자	박노성	설계자	정광욱		설 계	심 사		결 재
											2021년 12월 일	2021년 12월 일
변 경 설 계 서(6차 1회)
	용 역 명 : 서울시 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역 3공구(6차 1회)
	구 분					당 초				변 경			증, 감
	총 용 역 비					618,960,000				814,960,000			증) 196,000,000
	도급비		공 급 가 액			555,650,685				662,910,685			증) 107,260,000
			물 가 변 동			-				61,590,000			증) 61,590,000
			소 계			555,650,685				724,500,685			증) 168,850,000
			부 가 가 치 세			55,565,069				72,450,069			증) 16,885,000
			손해배상공제료			7,744,246				18,009,246			증) 10,265,000
			계			618,960,000				814,960,000			증) 196,000,000
< 용역개요 > ○ 총 연 장 : 1,642m [정거장 3개소] ○ 과업기간 - 당 초 : 2021.04.25. ~ 2022.03.07. - 변 경 : 2021.04.25. ~ 2022.06.28.