문서번호	도시철도토목부-13329
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
한재호		허동	12/03 최병훈
협조

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

건설폐기물처리용역 설계변경(총차4회, 6차5회) 검토

2021. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

건설폐기물처리용역 설계변경(총차4회, 6차5회) 검토

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역』관련 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경(총차4회, 6차5회)에 대한 검토임.

※ 총차 용역기간 변경(증 212일),  6차 계약금액 변경(증 27,643천원)

1		용역개요

○ 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역

○ 규    모 : 총 36,959.6ton

- 폐아스콘 11,126ton, 폐콘크리트 22,601.6ton, 건설폐자재 3,144ton, 혼합건설폐기물 88ton

○ 계약업체 : 대진환경산업(주) 대표 장인자

○ 계약현황

구 분		전 체	기시행(1~5차)	금회(6차)	장 래
용역기간		`15.08.24 ~ `21.12.31	`15.08.24 ~ `18.12.31	`19.02.14 ~ `21.12.31	`22.01.01 ~
계약금액		964,000천원 (100.0%)	572,779천원 (59.4%)	182,670천원 (19.0%)	208,551천원 (21.6%)
계약내역	폐아스콘	11,126 ton	4716.19 ton	2,500 ton	3,909.81 ton
	폐콘크리트	22,601.54 ton	14810.76 ton	4,017.78 ton	3,773 ton
	건설폐자재	3,144 ton	2414.86 ton	329.14 ton	400 ton
	혼합건설폐기물	88 ton	- ton	88 ton	- ton

2		보고내용

○ 내    용

- 총 차 : 본 공사 공정에 따라 원활한 폐기물 처리를 위한 용역기간 변경

- 6  차 : 본 공사(8차) 중 발생된 폐기물 정산에 따른 계약금액 변경

○ 현    황

- 총 차

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
계약금액	964,000,000	964,000,000	-
계약기간	`15.08.24 ~ `21.12.31	`15.08.24 ~ `22.07.31	증 212일

- 6  차

구 분		단위	단가 (원)	수 량			금 액(천원)
				당 초	변 경	증·감	당초	변경	증·감
운반비	폐아스콘	ton	8,422	2,500	1,799.57	-700.43	21,055	15,156	-5,899
	폐콘크리트	ton	8,605	4,017.78	6,114.26	2,096.48	34,573	52,613	18,040
	건설폐자재	ton	8,605	329.14	310.31	-18.83	2,832	2,670	-162
	건설폐기물 상차/운반비	ton	38,880	88	22.37	-65.63	3,421	870	-2,552
처리비	폐아스콘	ton	15,138	2,500	1,799.57	-700.43	37,845	27,242	-10,603
	폐콘크리트	ton	13,840	4,017.78	6,114.26	2,096.48	55,606	84,621	29,015
	건설폐자재	ton	23,356	329.14	310.31	-18.83	7,687	7,248	-440
	건설폐기물 상차/운반비	ton	34,601	88	22.37	-65.63	3,045	774	-2,271
계							166,064	191,194	25,130
부가가치세							16,606	19,119	2,513
합 계							182,670	210,313	27,643

3		관리단 검토의견

하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 준공기한에 따라 폐기물처리가 원활히 수행될 수 있도록 건설폐기물처리용역에 대한 준공기한 연장은 타당하다고 판단됨.

4		조치의견

하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역에 대하여 상기 검토의견과 같이 승인하고, 총차 용역기간 변경 및 6차 계약금액 변경을 하고자 함.

붙임   1. 관리단 공문 및 검토의견서 1부.

2. 관련서류 1부.

3. 총차 및 6차 내역서 1부.  끝.