문서번호	도로보수과-10835
결재일자	2021. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
황태선		김순수	12/06 고영준
협조

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

설계변경(3회,정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  12.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

설계변경(3회, 정산) 검토 보고

우리사업소에서 시행중에 있는『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』과 관련하여 시공물량 증·감에 따른 설계변경(제3회, 정산)을 시행하고자 함.

		공사개요

❍ 공 사 명 : 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)-북부

❍ 공사기간 : 2021.01.28.~2021.12.31

❍ 공사규모 : 과속방지턱 도색 931㎡, 부속물 세척 11,365㎡ 등

❍ 공 사 비 : ******************

❍ 시 공 사 : **************

		설계변경 사유

****************************************************

***************************************************

		주요 변경내용

❍ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 금 액			비고
		당 초	변 경	증·감
총공사비		***********	***********	************
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가세	**********	**********	************
	도급액	***********	***********	************
관 급 비		**********	**********	************
이 전 비		**********	**********	************

❍ 주요 공종 변경 내역

연번	공 종	규격	단위	수 량		증·감	비고
				당초	변경
1	과속방지턱 도색		㎡	***	***	*
2	옹벽보수	콘크리트 표면처리	㎡	*****	*****	*
3	메쉬형 울타리 철거	H=1.8m, W=2.0m	경간	****	**	*******
4	중앙분리대 (가드레일)설치	SB-5	경간	**	**	*******
5	구조물세척		㎡	*********	*********	*
6	갈매기표지 설치	60×45	개	**	**	*******
7	무단횡단금지시설 설치	독립형	경간	***	***	*
8	무단횡단금지시설 철거		경간	***	***	*

- 예산과목

· (일반회계)안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리. 도로부속시설물 일상 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

· (교통사업특별회계) 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전관련 도로부속물 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

		조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 시공물량 변경사항에 대하여는 설계변경(정산)을 시행하여 변경계약 체결 후 준공처리하고자 함.

붙임 1. 설계변경(3회) 내역서 1부

2. 설계변경(3회) 사유서 1부.

3. 설계변경 검증 확인서 1부.  끝.