문서번호	도시철도토목부-13403
결재일자	2021. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
한재호		허동	12/06 최병훈
협 조
	주무관			이형일

『하남선(5호선 연장) 1공구 건설사업』

사후환경영향조사 용역(8차) 발주계획 검토보고

2021.12.

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1공구 건설사업』

사후환경영향조사 용역(8차) 발주계획 검토보고

「하남선(5호선 연장) 1공구 건설사업」 환경영향평가 협의내용에 대한 적정이행 여부 관리를 위한 사후환경영향조사 용역 8차분 발주계획 보고 임.

※관련문서 : 동기공 2021-6953호(2021.11.29.) - 8차분 계약 관련 자료 제출

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 1공구 사후환경영향조사 용역

○ 계 약 자 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 1개사

○ 계약금액 : 금537,130천원

○ 용역기간 : `15.05.12. ~ `22.07.31.

○ 과업목적 :『환경영향평가법』에 의거 환경영향평가 이행여부를 파악하기 위해 조사․분석 및 평가하고, 예기치 못한 사항이 발생될 경우 그에 대한 대책 수립

□ 추진경위

○ `13.06.18 : 전략환경영향평가 협의완료

○ `14.12.31 : 하남선 복선전철 건설사업(1공구) 환경영향평가 협의완료

○ `15.05.12 : 사후환경영향조사 용역 착수

□ 계약 및 발주현황

(단위 : 천원)

구 분	총 차	기 발주 (1 ~ 7차)	금 회 (8차)	잔 여 액
계약금액 (비 율)	537,130 (100%)	516,850 (96.2%)	19,367 (3.6%)	913 (0.2%)
계약기간	`15.05.12. ~ `22.07.31.	`15.05.12. ~ `21.12.31.	`22.01.01. ~ `22.07.31.	-

□ 8차분 발주계획

○ 발주내역

(단위 : 원)

구 분	기 발주 (1~7차)	금 회 (8차)
직접 인건비	73,904,020	5,819,012
1) 사업별추진경위	583,495	58,350
2) 환경영향조사 조사결과 조치	48,443,574	3,833,157
3) 협의내용 관리, 이행현황	23,411,910	1,813,492
4) 종합평가 및 도출	987,172	76,548
5) 부록의 작성	477,869	37,465
2. 직접경비	280,183,582	2,931,324
1) 측정경비	273,116,722	2,533,644
2) 인쇄비	2,429,700	186,900
3) 출장비	4,637,160	210,780
3.제경비 (직접인건비의 100~120%, 110% 적용)	81,294,421	6,400,913
4.기술료 ((직접인건비+제경비)×20~40%), 20% 적용)	31,081,613	2,455,115
공급가액 (1 + 2 + 3 + 4)	466,463,636	17,606,364
부가가치세	46,646,364	1,760,636
손해배상보험료	3,740,000	-
총 용역금액	516,850,000	19,367,000

○ 과업내용

- 환경영향평가 협의내용(저감방안) 이행여부 현황조사

- 환경질 측정 및 환경기준 초과시 대책 수립

․ 대기질, 수질, 토양, 소음․진동 등 측정

- 환경영향평가조사 결과 통보서 작성

- 사후환경영향조사 결과 통보서 승인기관(국토부), 협의기관(환경부) 제출

○ 예산과목

- 광역교통시설특별회계, 광역철도건설사업(광역교통시설특별회계), 하남선(5호선 연장) 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 시설비

□ 조치계획

○ 하남선 1공구 건설공사 환경영향평가 협의내용에 대한 적정 이행여부 관리를 위해 상기 보고내용과 같이 사후환경영향조사용역 8차분에 대하여 발주 시행코자 함.

- 용역기간 : `22.01.01. ~ `22.07.31

- 용역금액 : 19,367천원

붙임 : 관련서류 1부.  끝.