문서번호	기전과-6938
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		12/07 서승완
협조

『고척아이파크 신축』

원인자부담공사 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

강서도로사업소

(기전과)

『고척아이파크 신축』

원인자부담공사 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    실정보고가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-16049(2021.07.22.)호

HDC현산 고척아이파크 제2021-204(2021.11.29.)호

대영전기감GE 21C-12-04(2021.12.02.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 고척아이파크 신축공사 중 교통안전시설물공사

원 인 자 : HDC현대산업개발㈜

공사기간 : 2019.04.10. ~ 2022. 09. 30.

공사장소 : 구로구 고척동 고척아이파크 신축공사 현장 주변

공사개요 : 단계별 교통신호지주 이설 → 신호기 신설 및 이설

관련업체 및 주요 설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	주요설치내용
신호기	㈜동림티엔에스	대영유비텍㈜	㈜다옴건설	· 신호기 신설 및 이설

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

- 서울특별시경찰청 추가 규제 하달 및 현장여건 변동에 따른 설계변경

설계변경내용

구 분	변경내용		비 고
	변경전	변경후
제어기	-	- 신설 5, 철거 2대
경보점멸기	- 신설 3, 철거 3대	- 철거 2대
지주	- 신설 5, 철거 5본	- 신설 42, 이설 5, 철거 25본	지주통합(신호+가로등) 7본
신호등	- 신설 9, 철거 9조	- 신설 96, 철거 37조
음향신호기	-	- 신설 57대

기타 보고내용

- 전방신호 운영체계로 횡단보도로부터 차량 정지선 11m 이격 설치 필요

- 횡단보도 내 지장물(한전주, 통신주, 수목 등) 이설 또는 제거(원인자) 필요

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

감리용역비 추가 부과 요청

원인자 및 유관기관(업체) 승인통보

붙임 1. 승인요청 및 감리사 검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계도면(변경전후) 1부.  끝.