문서번호	하천관리과-16201
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하천계획팀장	하천관리과장
박계현		권혁제	12/07 손경철
협조
	실무사무관		이경훈

- 홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 -

용역 준공 결과 및 추진계획 보고

2021. 12.

물순환안전국

(하천관리과)

- 홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 -

용역 준공 결과 및 추진계획 보고

「홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역」에 대한 준공

결과 및 추진계획을 보고드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역

❍ 계약금액 : 153,603천원

❍ 계약기간 : ‘20. 5. 20. ~ ‘21. 11. 20.

❍ 계 약 자 : 동부엔지니어링 외 1

❍ 과업 주요내용

- 하천 산책로 단절구간 연결 및 쉼터 조성 등

□ 추진경위

❍ ‘20. 5. 20.  : 용역 착수

❍ ‘20. 6. 05.  : 착수보고 (시․구의원, 구청장 및 주민대표 등 의견 수렴)

❍ ‘20. 7.~12.  : 현황분석 및 산책로, 쉼터 등 기본구상안 수립

❍ ‘21. 1.~ 9.  : 포장, 데크, 시설물 등 계획 및 설계도 작성

- 설계사와 현장 합동점검 (5/26. 9/2)

- 종로구청장 설계 내용 보고 (6/24), 좋은 빛 위원회 심의 (5/4,7/5)

❍ ‘21. 8. ~ 9  : 자문(서면) 시행 및 자문의견 반영

❍ ’21. 9. ~ 10. : 건설기술심의 요청 및 시행 (10/29 심의결과 통보)

❍ ’21. 11. 08.   : 계약심사 요청 (11/15 심사결과 통보)

❍ ’21. 11. 15.   : 설계도서 인계 및 공사시행 요청(시 → 종로구)

❍ ’21. 12. 01.   : 준공검사

❍ ’21. 12. 02.   : 준공결과 보고

□ 용역 준공 보고

❍ 일    시 : ’21.12.02.(목) 16:00~17:00

❍ 장    소 : 물순환안전국장 및 하천관리과장 집무실

❍ 참 석 자 : 물순환안전국장, 하천관리과장, 하천계획팀장, 담당

동부엔지니어링 (설계사)

❍ 보고내용 : 산책로 연결, 생활하수관 정비, 진출입로, 주변개발계획 검토

❍ 시공시 반영사항

********************************************

**************************************

******************************

*******************************

***********************************

******************************

*************************************

*******************************************          ***********

□ 추진계획

❍ ’21. 12. 10 : 입찰 공고 (예정)

❍ ’21. 12. 20 : 현장 합동점검 실시 (시공시 반영사항 확인 및 검토)

❍ ’21. 12 말.  : 계약 및 착공

❍ ’22. 01 중.  : 주민설명회 개최 (종로구 주관)

❍ ’23. 12 말.   : 공사 준공.  끝.