문서번호	서부권사업과-3494
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	사업개발팀장	서부권사업과장	균형발전기획관		균형발전본부장
김은진	윤영선	김종호	김승원		12/07 서성만
협 조

「독산동 우시장 점포환경개선 기본디자인 및 실시설계 용역 외 1건」

설계변경 검토 보고

2021. 12.

균형발전본부

(서부권사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「독산동 우시장 점포환경개선 기본디자인 및 실시설계 용역 외 1건」

설계변경 검토 보고

독산동 우시장 상권재생을 위해 추진중인「독산동 우시장 점포환경개선 기본디자인 및 실시설계 용역 외 1건」의 설계변경 및 변경계약 체결에 대한 검토내용을 보고드림

Ⅰ		용역개요

1. 독산동 우시장 점포환경개선 기본디자인 및 실시설계 용역

○ 계약금액 : *********

○ 계약기간 : ***********************

○ 계 약 자 : ******************

○ 과업내용 : 독산동 우시장 상가(점포) 기본디자인 및 실시설계

2. 독산동 우시장 악취환경개선 기본계획 및 실시설계 용역

○ 계약금액 : *********

○ 계약기간 :************************

○ 계 약 자 : *******************

○ 과업내용 : 독산동 우시장 일대 악취저감 실행계획 및 실시설계

Ⅱ		추진경위

○ ’20.12.02.	점포환경개선 기본디자인 및 실시설계 용역 착수

○ ’20.12.15.	악취환경개선 기본계획 및 실시설계 용역 착수

○ ’21.07.23.	점포환경개선 기본디자인 및 실시설계 용역 변경

- *********************** 계약금액 및 용역기간 변경

구 분	당 초	변 경	증 감
계약금액	*********	*********	***********
용역기간	*********************	*********************	******

○ ’21.10. ~ 11.	시-구-상인회 합동회의

- ***********************************

○ ’21.11.26.	*************************

Ⅲ		추진상 문제점 및 검토의견

○ 문제점

- **************************************

*****************************************

****************************************************************************************

	< 시-구-상인회 합동회의 결과 >
********** ********************************************************************************* ********* **************************************************************************************************************

○ 검토의견

- *******************************

*************************************************************************************

*********************************************************

Ⅳ		설계변경 내용

○ 설계변경 사유

- 원활한 사업추진을 위해 *************** 설계변경 필요

○ 설계변경 내역

① 독산동 우시장 점포환경개선 기본디자인 및 실시설계 용역

구 분		변경 전	변경 후	비 고
Ⅰ. 실시설계		**********	**********	*************
Ⅱ. 디자인설계		***********	**********	************
	① 직접인건비	**********	**********	****************
	② 직접경비	**********	**********	***************
	③ 제경비	**********	**********	***************
	④ 창작료	**********	**********	****
Ⅲ. 견본제작설치		**********	**********	****
소계(원)		***********	***********	************
부가가치세		**********	**********	*************
총계(원)		***********	***********	************

② 독산동 우시장 악취환경개선 기본계획 및 실시설계 용역

구 분		변경 전	변경 후	비 고
Ⅰ. 악취개선 기본계획		**********	**********	************
	① 현황조사 및 분석	*********	*********	****
	② 기본계획 수립	**********	**********	****
	③ 선처리시설 기본계획 수립	*********	*******	***************
	④ 악취저감 실행계획	*********	*********	***************
	⑤ 용역 경비	*********	*	***************
Ⅱ. 악취개선 실시계획		**********	**********	************
	① 악취저감 실시설계	**********	**********	***************
	② 용역 경비	*********	*	****************
Ⅲ. 제경비		**********	**********	************
Ⅳ. 기술료		**********	**********	*************
Ⅴ. 손해배상보험료		*********	*********	*************
소 계		***********	***********	************
부가가치세		**********	**********	************
총계(원, 만원 단위 절삭)		***********	***********	************

Ⅴ		추진방향

○ ************반영하고, ************* 설계변경 및 변경계약 체결 추진

○ ***********************************************

Ⅵ		향후계획

○ ’21.12.09.	설계변경 및 변경계약 체결

○ ’21.12.14.	용역 준공

붙임  1. 설계(변경)내역서 각 1부.

2. 합의각서 각 1부.  끝.