문서번호	토목부-22786
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
정원범		김동현	12/08 임춘근
협조
	주무관		박상철

가설방음벽 및 방호벽 철거 등 재설치 검토보고

-내부순환로(월곡IC)구조개선공사-

2021. 12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

가설방음벽 및 방호벽 철거 등 재설치 검토보고

-내부순환로(월곡IC)구조개선공사-

본 공사와 관련하여 코업스타클래스 보도앞 공사중 발생하는 소음,분진 저감을 위한 가설방음벽과 공사 진출입부 방호벽 철거 등 재설치 검토보고드림

□ 관련근거

○ ‘21.03.16. : 월곡IC 공사관련 정릉천 제방정비요청 (성북구청 치수과–3903)

○ ‘21.12.06. : 가설방음벽 및 방호벽 실정보고 (월곡감21-310호)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 내부순환로(월곡IC)구조개선공사

○ 위    치 : 성북구 하월곡동 37번지 일대

○ 공사규모 : 연장 465m, 폭 6m(1차로)

○ 도 급 비 : 9,402백만원

○ 공사기간 : `20.02.12.~ `22.09.11.

○ 시 공 사 : ㈜큰빛종합건설 ○ 감 리 사 : 유신 외 1

□ 건설사업관리단 보고내용

○ 가설방음벽 및 방호벽 설치 위치도

범 례
신규설치 (방호벽)
철거 재설치 (방호벽)
가설방음벽

재설치 13m

철거 후 재설치 9m

가설방음벽 192m

당 초 (수량산출서도면)	변 경(신규 도면)

○ 가설방음벽 단면도

일반도	상세도

○ 방호벽 단면도 (신규)

○ 가설방음벽(L=192m) 변경사항

- 가설방음벽은 민원요청으로 설치된(성북구청 치수과-3903)시설물로서,설계도면이 없으며 수량산출서에 표기된 일반 표준 단면도로만 현장시공이 불가능하다고 판단하여, 현장여건에 맞는 설계도면을 새로 작성하고 차집관로 설치 전 소음 및 분진에 의한 주민들의 피해를 최소화 하고자 우선 시공(2020.12.)하였음.

- 기존 방호벽(1m) 상단에 추가로 설치하기 때문에 가설 방음판넬 높이를 (당초 3m → 변경 2m)수정함

- 방음벽 존치기간연장 : 당초 12개월 → 변경 24개월 반영

- 강풍 및 태풍등 보행자 안전을 고려하여 보호벽 천공 후 고정클램프 설치반영

○ 방호벽 (L=22m) 설치사항

- 성북구청요청 : 방호벽 미설치 구간 재설치 (13m)

- 공사장 진출입로 철거 및 재설치 (9m)

○ 공사비 현황                                               (단위 :  원)

구 분	단위	당 초			변 경			증(감-)	비고
		수량	단가	금액	수량	단가	금액
1. 토 공							71,550	71,550
1.1기존구조물깨기							71,550	71,550
b-1철근콘크리트깨기 (압쇄기(T=30cm이상)	㎥				3	23,850	71,550	71,550	기존단가
6. 부 대 공				9,952,320			25,173,163	15,220,843
6.3 환경관리비				9,952,320			18,967,236	9,014,916
a. 가설방음벽 (a-1가설방음판넬)	m	192	51,835	9,952,320	192	98,744	18,958,848	9,006,528	신규단가
d.폐기물상차비 (d-1.폐콘크리트)	ton				6	1,398	8,388	8,388	기존단가
6.15 고재대	ton				0.022	-293,720	-6,461	-6,461	기존단가
6.21 방호벽							6,212,388	6,212,388
a. 철근현장가공 및조립	ton				0.726	704,057	511,144	511,144	신규단가
b. 합판 거푸집	㎡				40	31,779	1,271,160	1,271,160	신규단가
c. 콘크리트타설	㎥				6	39,169	235,014	235,014	신규단가
d. 콘크리트천공 (Ø50mm, t=30cm)	개소				55	76,274	4,195,070	4,195,070	신규단가
직접공사비				9,952,320			25,244,713	15,292,393
제경비				3,161,680			14,775,287	11,613,607
도급액				13,114,000			40,020,000	26,906,000
관급자재대 (철근,레미콘)				322,000			996,000	674,000
총공사비				13,436,000			41,016,000	27,580,000

□ 조치계획

○ 본 공사중 가설방음벽 변경 및 방호벽 설치관련 건설사업관리단의 실정보고는 적정하다 판단하여 승인조치하고 추후 설계변경내역에 반영코자함.

붙임 : 가설방음벽 및 방호벽 실정보고서 1부.  끝.