문서번호	교량안전과-18592
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		강천수	12/08 조현석
협조

[2021년 강교 보수공사(연간단가)] 설계변경(1회, 정산)시행 검토 보고

2021. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

[2021년 강교 보수공사(연간단가)]

설계변경(1회, 정산) 시행 검토 보고

『2021년 강교 보수공사(연간단가)』수량변경, 제경비 및 고용개선지원비 등 반영에 대한 설계변경(1회, 정산) 보고 임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관합 법률 시행령 제74조

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절(공사설계의 변경),제7절(계약금액의 조정)

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명	2021년 강교 보수공사(연간단가)	공사기간	2021.4.5.~2021.12.10.
공사규모	강재도장 : 2,250㎡ 강재용접 : 100m, 강판절단 : 60m 볼트조임 : 150개, 철판보강 등 : 0.9ton 공중비계 : 550㎡, 부대공 1식
공사비	총 공사비 : 446,823,000원 도급비395,293,000원, 이전비 12,000,000원
계약상대자	늘찬건설(주) 대표 박성수 외 1개사

Ⅲ		설계변경 주요내용

≪주요 사항 및 설계변경 사유≫

□ 1차(영동대교) 완료보고(한강교량감-347)

□ 2차(가양대교) 추가작업지시 및 완료보고(교량안전과-9671, 한강교량감-390)

□ 3차(금천교) 실정보고(교량안전과-12871)

□ 4차(동호대교) 실정보고(교량안전과-16980)

□ 5차(천호대교) 실정보고(교량안전과-15887)

□ 건강보험, 국민연금보험 등 제경비 정산결과 반영

※ 건설사업자(동명기술공단) 설계변경 도서 제출 : 동기공 2021-7206호(2021.12.07.)

□ 주요 공종별 물량 변경 현황

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증·△ 감
1.강재보수공
전기아크용접Fillet(횡향)용접	(t=6mm,수동),야간	m		1,549	1,549
강판절단(수동)	t=12mm,야간	m	-	477	477
잡철물제작 및 설치(간단)	t=3.2mm	ton	0.3	1.645	1.345
철판	t=3.2mm	ton	-	1.810	1.810	신설
철판	t=10mm	ton	-	14.223	14.223	신설
2.강재도장공
강교도장(외부) 우레탄(주간)	215㎛/㎡(SP10),에어리스스프레이	㎡	450	605.6	155.6
강교도장(외부) 우레탄(주간)	215㎛/㎡(SP3),에어리스스프레이	㎡	300	872.3	572.3
강교도장(외부) 우레탄(야간)	215㎛/㎡(SP3),에어리스스프레이	㎡	100	659.3	559.3
용접부 표면처리(야간)	215㎛/㎡(SP3),용접부사상	㎡	-	147.95	147.95
3.부대공
공중비계 설치 및 철거	3월미만,주간	㎡	550	831.5	281.5
보호막(분진,방진)설치	PE보호막,1.5*70m	㎡	550	2,364.6	1,814,6
싸인보드	주간,2.5ton+싸인보드,1450*1450*50(LED27구)	hr	150	112	38
싸인보드	야간,2.5ton+싸인보드,1450*1450*50(LED27구)	hr	50	232	182
탑제형크레인	주간,5톤	hr	-	96	96
탑제형크레인	야간,5톤	hr	-	88	88

□ 공사비 증·감 현황

(단위:원)

구 분	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증·감
1.강재보수공	11,069,070	60,971,613	49,902,543
2.강재도장공	179,672,607	210,206,977	30,534,370
3.부대공	44,383,900	95,358,273	50,974,373
직접공사비	235,125,577	366,536,863	131,411,286
제경비	199,697,423	248,959,337	49,261,914
도급금액	434,823,000	615,496,200	180,673,200
이전비	12,000,000	11,173,800	826,200
총사업비	446,823,000	626,670,000	179,847,000

□ 설계변경 사항

○ 1차(영동대교) : B램프 도장물량 감소

- 한강교량감 2021-347(2021.07.02.)

○ 2차(가양대교) : 보차도 방호벽 내측 도장손상부 추가도장

- 교량안전과-9671(2021.06.21.), 한강교량감 2021-390(2021.07.19.)

○ 3차(금천고가) : 계단 철판보강

- 교량안전과-12871(2021.08.19.), 1종교량 제21-275호(2021.09.16.)

○ 4차(동호대교) : 방호책 철보강 및 도장

- 교량안전과-16980(2021.11.10.), 한강교량감 2021-656(2021.11.9.)

○ 5차(천호대교) : 본교 신축이음 및 램프B 구간 공중비계 및 보호막 수량증가

- 교량안전과-15887(2021.10.21.), 한강교량감 2021-729(2021.12.7.)

○ 제경비(보험료, 고용개선비 등) 주요 항목의 사후 정산

○ 이전비(폐기물 외) 처리비 정산

Ⅳ		책임건설사업자 검토의견

□ 설계변경 검토의견

○ 강교 보수공사(연간단가) 금회 설계변경(1차, 정산)은 불필요한 공정 및 공사비 절감 내용 검토결과 적정 하다고 판단되며,

○ 『지방 자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제74조 제 4항의 1[증·감된 공사량의 단가는 제15조 제6항 또는 제7항에 따라 제출한 산출 내역서상의 단가(이하 계약단가)로 한다]에 의거 당초 계약 단가 적용은 적정한 것으로 판단됨.

○ 변경 도서는 관련 기준에 부합하게 이루어 졌으므로 검토 내용과 같이 설계변경을 시행하는 것이 타당하다고 판단됨

□ 설계변경 적용 단가

○ 추가 공사에 대한 적용 단가는 협의단가(낙찰율 88.53%) 적용

□ 공사기간

○ 변경없음(2021.4.05. ~ 2021.12.10.)

Ⅴ		조 치 의 견

○ 실정보고(3회)에 따른 실시공 물량 및 주요 공종 수량 및 공사비 정산 등에 의한 도급비 변동액은 180백만원(한강교량 일상유지 예산 160,806,200원 + 강교 보수공사 예산 19,040,800원)증액되며, 제경비 및 관급비, 이전비 등 제반 규정에 따라 정상적으로 정산됨.

○ 예산내역

예산구분	낙찰차액 사용금액	비 고
한강교량 일상유지	161,806,200 (동호대교 강재방호책 보수에 사용)	‘21년 한강교량 일상유지 보수공사(1,2공구) 낙찰차액 활용계획 보고(교량안전과-15013) ※예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 한강교량일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비
강교 보수공사	19,040,800 (천호대교 도장보수에 사용)	2021년 강교 보수공사(연간단가) 낙찰차액 활용계획 보고(교량안전과-15424) ※예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 강교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 상기 검토의견과 같이 건설사업관리단에서 보고한 설계변경건은 적정한 것으로 판단되어 설계변경계약을 의뢰하고자 함.

Ⅵ		향 후 계 획

○ ‘21. 12.  8. 설계변경 및 변경계약 의뢰

○ ‘21. 12. 10. 준 공 검 사

붙 임 : 1. 감리단 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 계약금액 검증 확인서 1부.   끝.