문서번호	기전과-7001
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 12/08 서승완
협조

2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

설계변경 검토보고(2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

강서도로사업소

[기  전  과]

2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사
설계변경 검토보고(2회)

2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 관련하여 감리업체가 제출한 설계변경(2회)에 대하여 내용을 검토하고 그  결과를 보고 함

□ 관련근거

○ 2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경(2회) 요청

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE21A-12-20호(2021.12.08.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

○ 공사위치 : 양천구 구립양천어르신요양센터 앞. 서부트럭터미널사거리,                  강서구 유광사여성병원 앞

○ 공사내용

- 구립양천어르신요양센터 앞 : 신호기(차) 신설

- 서부트럭터미널사거리 : 신호기(차/보) 이설

- 유광사여성병원 앞 : 유턴 신설

○ 계약금액 : 93,841,000원

○ 공사기간 : 2020.6.11. ∼ 2021.12.13.

○ 계약업체 : ㈜초이 대표 최행화

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 설계변경 사유

- 실정보고(2회) 승인내용 반영 내역서 변경 및 보험료 등 제경비 정산

- 전기안전점검 수수료 반영

○ 설계변경 내용

공 종	주요 변경내용	변경금액
음향신호기	설치물량 감소 2(2→0)	감)1,760천원
디자인 보행용 보호금구	설치물량 감소 1(1→0)	감)88천원
디자인 부착대 조가선 9M	설치물량 감소 1(2→1)	감)218천원
제경비	간접노무비 및 보험료 등	감)6,041천원
합 계	주요 변경내용	감)8,107천원

※ 상세 내용 및 내역 붙임 설계변경 참조

□ 설계변경금액(총괄)

구 분	당 초	변 경	증감액
도 급 비	93,841,000원	85,734,000원	감)8,107,000원

□ 조치의견

○ 실정보고 승인내용을 반영한 내역서의 변경 및 전기안전점검 수수료를      반영한 감리업체의 설계변경 내용이 적정하여 이를 승인하고 설계변경      시행하고자 함

붙임  2020년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경(2회)          요청 1부.  끝.