문서번호	시설관리과-28670
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
최준혁	유세종	12/08 代이유찬
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고(정릉동 202-58 ~ 168-29호 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2021. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

설계변경 심의자료

가. 공 사 명 : ***********************개소 장기사용 배급수관 정비공사

나. 제    목 : 설계변경심의

다. 일    시 : 2021. 12. 08.(월) 오후 16:30

라. 참 석 자 : ************************************************

마. 공사개요

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	********	******
변 경	********	****	*******

바. 공사기간 : 2021. 04. 29. ~ 2021. 12. 09.

사. 공사금액

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비 (VAT포함)	************	************	**************

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : *******************호 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사

나. 공사개요

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	********	******
변 경	********	****	*******

다. 공사기간 : 2021. 04. 29. ~ 2021. 12. 09.

라. 수 급 인 : ***************

2. 설계변경 사유보고

가. 공종별 주요 공사비 변경

연번	공 종	주요 변경내용	공사비(증·감)	비고
1	******	********************	***********
2	*****	*********************	***********
3	****	*******************	***********
4	**********	****************************	************
5	***** *** ******	*********************** *********** ********** ********* ************* ***********	***********	**************
6	****** ******	********************************	***********	*********

나. 실정보고에 따른 설계변경

연번	구 분(제목)	주요 변경내용	관 련 근 거
1	*************	*****************	***** ******* ************
2	************ ******	****************************** ****************** *************	***** ******* **********
3	************** ********	************************ ***************** ********************	***** ******* ***********
4	******* *********	*********************** ****************	***** ******* ***********
5	******* *********************	*********************** *************************************	***** ******* ***********
6	*******	*********************	***** ******* ************
7	************** ***************	*********************** ********************************************** ******************************	***** ******* ************
8	********* ******* ********* **************	*************************************** ************************ ************************** *****************	***** ******* ************
9	******* ********** ********************	************************ ********************** ***********************	***** ******* ************

3. 주요 공종수량 증․감 발생 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증, 감
관부설	**********	m	******	****	*******
각종변실설치	**********	개소	**	**	*****

4. 공사비 변경

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공 급 가 액	************	************	****************
	부가가치세	***********	***********	****************
	계	************	************	****************

5. 설계변경 검토결과

****************************

*************************************

******************

붙 임  1. 설계변경 심의위원회 개최 자료 각 1부.
2. 설계변경 내역서 1부.  끝.