【별지 제7호서식】

설계변경 심사요청서

부분공개(5)

시 행	도로보수과-7089
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접수번호
접수일자

주무관		도로보수과장				결재
정상수		12/08 한정환
협 조

공 사 명	2021년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-강서		요청기관	강서도로사업소 (도로보수과)
공사위치	강서도로사업소 관내(강서구, 양천구, 영등포구, 구로구)
공사기간	착공일로부터 2021.12.24.		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
계약금액 (최초계약 금액)	3,836,151,000원(3,206,000,000원)
예산내역	세부 사업명	예산과목				예산액(천원)
	2021년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-강서	도로굴착복구기금				5,227,400
공사개요	절삭후 덧씌우기 426.3a 굴착복구(야간-개소별 30㎡초과) 208.8a 굴착복구(주간) 43.9a
설 계 자	․상 호 : ․ 대 표 자 : ․책임기술자 : (전화번호 : )
발 주 자	․담 당 자 : 정 상 수 (전화번호 : 2657-7951)
◦ 설계변경 사유 : 굴착복구 및 덧씌우기 물량 변경 - 굴착복구(B-Type,30㎡초과) 작업지시 물량 증가로 변경 156a → 208.08a 증) 52.08a - 절삭후아스팔트덧씌우기 (C-Type, t=5cm, 18a) 수량 변경 145a → 217.71a 증) 72.71a - 절삭후아스팔트덧씌우기 ( B-Type, t=5cm, 34a) 수량 변경 80a → 154.13a 증) 74.13a - 절삭후아스팔트덧씌우기 ( A-Type, t=5cm, 50a) 수량 변경 55a → 54.46a 감) 0.54a
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(설계변경내역서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	서울특별시 강서도로사업소장