투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	2021년 어린이보호구역 교통신호기 공사 설계변경 시행

1. 기전과-6817(2021. 12. 3.)호 설계변경 검토 보고 관련입니다.

2. 2021년 어린이보호구역 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 어린이보호구역 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2021. 07. 19. ~ 2021. 12. 15.

다. 계약업체 : ㈜석현이엔씨 대표 국석호

라. 설계변경금액

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	44,184,000원	42,671,000원	감) 1,513,000원

마. 변경사유 : 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경, 실제 시공물량 정산, 제경비 정산, 전기안전검사 수수료 등 수정 내용을 반영한 내역의 변경

바. 예산과목 : 교통약자 이동편의 증진, 어린이 안전 영상정보 인프라 구축, 시설비

붙임  1. 설계변경보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경도면 1부.

4. 계약금액조정검증확인서 1부.

5. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	오태환		기전과장	12/03 代김흥식
협조자
시행	기전과-6822	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동)	/
전화	02-2657-7989	/전송	02-2657-7939	/	taehwan12@seoul.go.kr	/	대시민공개