투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 설계변경 시행

1. 기전과-6909호(2021.12.6.) 설계변경 검토보고 관련입니다.

2. 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을      시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2021.6.15. ~ 2021.12.10.

다. 계약업체 : 해솔이엔씨(주) 대표 허지훈

라. 설계변경금액

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	272,647,510원	236,995,000원	감)35,652,510원

마. 변경사유 : 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경, 보험료 등 제경비 정산 및 음향신호기

기능검사비, 전기안전점검 수수료, 폐기물처리비를 반영한 내역의 변경

바. 예산과목 : 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비

붙임  1. 설계변경보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경도면 1부.

4. 계약금액조정검증확인서 1부.

5. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	호정오		기전과장	전결 12/06 서승완
협조자
시행	기전과-6913	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개