투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 변경계약의뢰(2021년 노후포장도로정비 강서2구역 노면표시공사)-제2회(최종,수정)

1. 우리사업소에서 시행중인 「2021년 노후포장도로정비 강서2구역 노면표시공사」에 대하여 아래와 같이 제2회(최종,수정) 설계변경시행 및 변경계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2021년 노후포장도로정비 강서2구역 노면표시 공사

나. 공사개요: 차선도색 L=120,145m

다. 공사기간:: 2021.4.19.~ 2021.12.31.

라. 도 급 자: **********

마. 변경사유: 노후포장도로 정비공사 완료에 따른 노면표시 실 시공물량 반영

바. 공사금액 변경

구 분	설계변경 금액(원)			비고
	당 초	변 경	증· 감(-)
공급가액	***********	***********	*************
부가세	**********	**********	************
도급비	***********	***********	증*************

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비(예산편성부서 : 안전총괄실 도로관리과)

붙임  1. 설계변경 방침서  1부.

2. 설계변경 내역서(2차)  1부.

3. 책임감리 검토보고서 1부.

4. 합의각서 1부. 끝

5. 제비율 검증 확인서 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	박세준		도로보수과장	12/07 한정환
협조자
시행	도로보수과-7057	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7941	/전송	02-2657-7960	/	sejun486@seoul.go.kr	/	부분공개(5)