문서번호	도로계획과-15809
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로공간계획팀장	도로계획과장
조중환	시희식	12/08 권완택

「태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계」

용역 준공기한 연기 보고

2021. 12.

안전총괄실

(도로계획과)

「태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계」

용역 준공기한 연기 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 태릉~구리IC간 광역도로 확장 기본 및 실시설계

○ 계 약 자 : ㈜유신 외 4개사

○ 계약금액 : (총차) 금2,736,096,000원
(2 차) 금1,859,128,000원

○ 용역기간 : (총차) 2016.11.14. ~ 2021.12.31.
(2 차) 2017.07.01. ~ 2021.12.31.

□ 보고내용

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경
총 차	´16.11.14.~´21.12.31.	´16.11.14.~´22.06.30.
( 2 차 )	´17.07.01.~´21.12.31.	´16.11.14.~´22.06.30.

○ 연기 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유 : KDI 타당성재조사(‘19.10~‘21.8) 이후 기획재정부의 총사업비 조정(협의) 기간이 장기간 소요됨에 따라 구리시 구간의 실시설계 과업 수행에 따른 절대공기 부족으로 과업기간 연장

※ 서울시 구간 실시설계 완료(‘18.12.)

2021. 12.

보 고 자 : 지방시설주사  조 중 환