투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2021년 도로함몰예방사업-서부 설계변경(제2회,정산)시행 및 계약의뢰

1. 도로보수과-11509(2021.12.07.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 사업추진중인 「2021년 도로함몰예방사업-서부」에 대하여 아래와 같이 설계변경계약(제2회,정산)을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 도로함몰예방사업-서부

나. 공사기간 : 2020. 3.09. ~ 12.31(변경없음)

다. 총공사비 : ************

********************************************************************

라. 도 급 자 :*****************

마. 설계변경금액

(단위: 원)

구 분	설계변경도급액		증․감	비고
	당 초	변 경
총 공사비	***********	***********	************
도 급 비	***********	***********	************
관 급 비	**********	**********	***********
이설비(폐아스콘 등)	**********	**********	***********

바. 설계변경사유

- 市공동조사 용역(4-2)결과, 공동원인조사 및 항구복구 통보에 대해 원인조사 및 조치결과에 따른 ************************ 복구완료에 대한 정산 설계변경 사유 발생

- 공동조사 및 복구수량 변경 :  ***************************************

사. 예산과목

- 안전총괄실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 부속물관리, 도로함몰예방사업, 시설비 및 부대비, 시설비 *********************

- 안전총괄실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 부속물관리, 노후포장도로정비, 시설비 및 부대비, 시설비*********************

붙임 1. 설계변경 시행계획 보고서 1부.

2. (제2회,정산)설계변경내역서 1부.

3. 설계변경계약금액 검증확인서1부.

4. 합의각서 1부.

5. 지반침하 관리대장(자체복구) 1부

6. 참고(市공동조사요청 문서사본) 1부.   끝.

	도로보수과장
주무관	권은용		도로보수과장	12/08 代이이용
협조자	주무관	장재영		주무관	이이용		관리단속과장	박성주
시행	도로보수과-11575	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(6)