코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립 용역 일시중지 알림

1. 물순환정책과-21136호(2021.12.08.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진중인『CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역』에 대하여 다음과 같이 과업을 중지코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역

나. 용역기간 : 2021.1.1.~12.31.

다. 계약금액 : 금339,220천원

라. 계 약 자 : ㈜범한엔지니어링 종합건축사사무소. ㈜삼우씨엠건축사사무소

㈜삼우전기컨설턴트

마. 과업중지일자 : 2021.12.08.

바. 과업중지사유

- 선행 무강우 일수 5일이상 준수에 따른 유량 및 수질조사 지연

□과업내용서 및 비점오염저감시설(국고보조사업)의 설치 및 관리지침에 따른 유량 및 수질조 모니터링 기준

- 한강유역환경청, 환경부등 관련기관 협의 및 보완을 위한 공기 부족

사. 과업중지기간 : 과업중지사유 해결시 까지.

붙임  1. 합의각서(공문 포함) 1부.

2. 보고서 1부.   끝.

	물순환정책과장
주무관	최용석		물순환시설팀장	김서연		물순환정책과장	12/08 代정여원
협조자
시행	물순환정책과-21150	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물순환정책과	/
전화	02-2133-3771	/전송	02-2133-1041	/	kr101092@seoul.go.kr	/	부분공개(5)