문서번호	기전과-7018
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
호정오		서승완	12/08 김용제
협조

2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

준공기한연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

강서도로사업소

[기  전  과]

2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사
준공기한연기 검토보고

2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사 관련하여 책임감리가 제출한 준공기한 연기요청에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고 함

□ 관련근거

○ 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사(금부빌딩 외 4개소) 준공기한 연기 요청

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE21A-12-19호(2021.12.08.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

○ 공사위치 및 내용

- 강서구 양천로 476 가양역 주변(금부빌딩 앞)

•횡단보도 신설, 신호기(차/보) 신설(연등처리)

- 강서구 강서로 406 일대(국민건강보험공단 강서지사)

•횡단보도 신설, 신호기(차/보) 신설

- 강서구 강서로 460 일대(평안빌딩)

•횡단보도 신설, 신호기(차/보) 신설

- 영등포구 선유로 146 이앤씨드림타워교차로

•대각선 횡단보도(2면) 신설, 신호등(보행등4) 신설(잔여포함)

- 영등포구 여의도동 1-1(서강대교 남단 대한민국헌정회 앞)

•횡단보도 신설, 신호기(차/보) 신설

○ 계약금액 : 114,272,300원

○ 공사기간 : 2021.9.23. ∼ 2021.12.13.

○ 계약업체 : ㈜현준이엔씨 대표 조현주

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 준공기한 연기내용 및 사유

○ 연기내용 : 2021년 12월 13일에서 2021년 12월 23일까지 연기

○ 연기사유 : 토목공사(금부빌딩-강서구청 교통행정과) 지연에 따른 공사기간 부족으로 준공기한 연기

□ 조치의견

○ 책임감리의 준공기한 연기요청 내용이 타당하여 관리단속과로 준공기한      연기의뢰하여 변경계약 시행

붙임  2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사(금부빌딩 외 4개소)

준공기한 연기 요청 1부.  끝.