문서번호	물순환정책과-21136
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장
최용석	김서연	12/08 代정여원

「CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역」

일시중지 검토 보고

2021. 12.

물순환안전국

(물순환정책과)

「CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역」

일시중지 검토보고

CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역과 관련, 유량 및 수질조사 지연, 한강유역환경청 등 협의에 따른 공기 부족에 따라 과업을 중지(중기기간중 용역 수행)하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립 용역

○ 용역기간 : ’21. 3.30. ~ ’21.12.31.

○ 용역수행사 : ㈜범한엔지니어링 종합건축사사무소, ㈜삼우씨엠건축사사무소, ㈜삼우전기컨설턴트

○ 계약금액 : 339,220천원

○ 사업내용 : CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립

- 뚝섬, 대치유수지 CSOs 저류조 설치계획 수립

□사업 타당성 및 경제성 분석‧결과 제시

□대상지역의 처리유량, 오염부하량 조사

□소요사업비 및 사업기간 산정, 연차별 투자계획 수립 등

- 기설치 시설 운영현황 분석을 통해 물재생센터 연계 운영계획 수립

- 유수지내 CSOs 저류조 설치 계획외 CSOs 저류‧처리 방안 제시 등

Ⅱ		추진경위

○ ’21.03.31. : 설계용역 계약 및 착수

○ ’21.06.01. : 착수보고

Ⅲ		과업중지 사유 및 기간

○ 선행 무강우 일수 5일이상 준수에 따른 유량 및 수질조사 지연

- 과업내용서 및 비점오염저감시설(국고보조사업)의 설치 및 관리 지침에 따른 유량 및 수질 모니터링 기준 충족

○ 한강유역환경청, 환경부 등 협의 및 보완을 위한 공기 부족
※  용역중기 기간 중 용역업무 및 관련기관 협의 계속 수행

○ 과업 중지일자 : 2021.12.08.

○ 과업 중지기간 : 과업중지사유 해결시 까지

Ⅳ		검토결과

○ 유량 및 수질조사 지연 사유가 타당하며 및 관계기관 협의 및 보완 등 행정 절차 이행을 위한 공기가 절대 부족함에 따라 중지 사유 해결시 까지 과업 중지.

Ⅴ		행정사항

○ ’21.12. : 용역 일시중지 요청(재무과)

○ ’22. 4. : 용역준공

붙임  CSOs 저류조 기본계획 과업중지 공문(용역사).  끝.

.