“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신자	행정관리팀장
(경유)
제 목	변경계약 시행(이산화탄소 투입설비 제조·구매 설치)

우리 정수센터에서 시행하고 있는 『이산화탄소 투입설비 제조·구매 설치』에 대하여 아래와   같이 설계 변경을 시행하고 변경계약을 의뢰 합니다.

가. 계 약 명 : 이산화탄소 투입설비 제조· 구매 설치

나. 계약기간  : 2021.4.13 ~ 2021.12.10

다. 계 약 자 : ㈜백광아이에스티,대표 최태호

라.변경내역

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증,감
계약금액	168,499,000원	166,394,000원	감)2,105,000원

마. 설계변경사유

- 보험료(건강보험료,연금보험료,노인장기요양보험료,퇴직공제부금비) 및 산업안전

보건관리비 실제금액으로 정산처리

바. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,시설비 및 부대비, 시설비(이산화탄소 투입설비 교체)

※ 2021.12.    . 감 추산필(번호:  )

붙 임 : 1. 이산화탄소투입설비 제조구매설치완료 및 변경계약 계획보고  1부.

2. 설계 변경내역서 1부. 3. 합의서 1부. 끝.

	정수과장
★주무관	강석규		주무관	代박은경		정수과장	12/08 방진표
협조자
시행	정수과-9966	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)