문서번호	정수과-9953
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규	방진표	12/08 이달영
협 조
	주무관		代박은경

이산화탄소 투입설비  제조 · 구매 설치 완료 및 변경계약 계획 보고

2021.12

광암아리수정수센터

(정수과)

이산화탄소 투입설비 제조 ·구매 설치  완료 및 변경계약 계획 보고

『이산화탄소 투입설비 제조·구매  설치 』대하여 설치 완료되어 작업상태

를 점검한결과 보험료 사후 정산에 따른 계약변경을 실시후 아래와같이

준공처리 하고자 함

Ⅰ		이산화탄소 투입설비 제조·구매 설치 계약현황

□ 계 약 명  : 이산화탄소 투입설비 제조 구매 설치

□ 계약기간  : 2021.4.13. ~ 12.10

□ 계약내역

○ 이산화탄소설비 기화기 2대 교체,투입장치 1대교체,

○ 이산화탄소 고압배관교체 1식(이산화탄소 기화기~ 이산화탄소 투입장치내)

************************************

****************************************

Ⅱ		이산화탄소 제조·구매설치 확인점검

□  작업기간    : 2021.9.4. ~ 12.7

□  설치 내역

구분	작업일자	작업내용
이산화탄소 기화기 철거	9/7~ 9/8	이산화탄소 기화기 2대, 배관철거
이산화탄소 투입설비 철거	9/8 ~9/9	투입설비 1식
이산화탄소 기화기 설치	9/13~9/16	이산화탄소 기화기 2대, 배관설치
투입기 설치	9/16~9/17	투입설비 1식,유량계,컨트롤밸브설치 샘플링 펌프 설치
현장제어설비반 전원결선	9/28 ~9/30	기화기 등 현장제어설비반 전원결선
pH 검출부 설치	11/29	pH 검출부 교체
시운전	11/29~ 12/7	시운전

□  점검결과 : 계약서 내용대로 완료 되었음

이산화탄소 기화기 철거 및 설치 완료		투입시설 철거전
이산화탄소투입시설 철거 및 설치완료 (컨트롤밸브 0점조정,가스유량 범위조정0~200kg/h. pH 검출부 교체)
투입후 pH샘플링펌프		시운전

Ⅲ		정산금액 및 정산 사유

□ 계약금액      : 168,499,000원

□ 변경계약 금액 : 166,394,000원

○ 정산금액(감액): 2,105,000원

○ 정산사유 :보험료(건강보험료 ,연금보험료,노인장기요양보험,퇴직공제부금비)및                산업안전보건관리비 정산에 따른 감액

공 종		규 격	계약금액(원)	변경계약금액	감액금액(원)
1.기자재비		기자재비(CO2기화기,200kg/h 2대)	19,600,000	19,600,000	0
		기자재비(CO2투입장치,200kg/h 1대)	80,000,000	80,000,000	0
		기자재비(감압밸브 0.9Ma 2개)	5,200,000	5,200,000	0
		기자재비(압력전송계 0~1.5Ma 1개)	3,500,000	3,500,000	0
		기자재비(온도전송계 0~100℃ 2개)	5,800,000	5,800,000	0
		기자재비(pH계측기 1~14)	9,300,000	9,300,000	0
		기자재비(샘플링펌프장치,pH미터 LOP)	6,200,000	6,200,000	0
		소계	129,600,000	129,600,000	0
2.기자재설치비		직접재료비	0	0	0
		직접노무비	1,606,142	1,606,142	0
3.배관자재및설치비		직접재료비	2,777,284	2,777,284	0
		직접노무비	1,838,816	1,838,816	0
		경비	27,285	27,285	0
4.배선자재및설치비		직접재료비	1,109,728	1,109,728	0
		직접노무비	7,753,660	7,753,660	0
		경비	0	0	0
5.기기 및 배관철거		직접재료비	0	0	0
		직접노무비	806,087	806,087	0
설치비 합계		직접재료비	3,887,012	3,887,012	0
		직접노무비	12,004,705	12,004,705	0
		직접노무비(12,004,705)*8%	960,376	960,376	0
		소계	16,852,093	16,852,093	0
산출경비			27,285	27,285	0
경비	보험료	산재보험료(노무비*3.7%)	479,707	479,707	0
		고용보험료(노무비*0.87%)	112,796	112,796	0
		산업안전보건관리비 (직접재료비+직접노무비)*1.85%	293,996	0	-293,996
		국민건강보험료(직접노무비*3.43%)	411,761	0	-411,761
		국민연금보험료(직접노무비*4.50%)	540,211	0	-540,211
		퇴직공제부금비(직접노무비*2.3%)	276,108	0	-276,108
		노인장기요양보험(건강보험료*11.52%)	47,434	0	-47,434
		기타경비(재료비+노무비)*5.6%	943,717	943,717	0
		소계	3,133,015	1,563,505	-1,569,510
일반관리비(재료비+노무비+경비)*6%			1,199,106	1,104,935	-94,171
이윤(노무비+경비+일반관리비)*15%			2,594,156	2,344,201	-249,955
합계				151,464,734
고재처리비			-197,461	-197,461
공급가액			153,180,909	151,267,273	-1,913,636
부가치세			15,318,091	15,126,727	-191,364
합 계			168,499,000	166,394,000	-2,105,000

Ⅳ		행정사항

□ 보험료(국민건강,국민연금,노인장기요양보험,퇴직공제부금비) 및 산업

안전보건관리비 2,105,000원 감액 정산처리하여 변경계약 하고자함

□  변경계약 금액 166,394,000원(일억육천육백삼십구만사천원)

□  변경계약후 납품검사원 접수하고자 함

붙임 : (1) 합의서               1부.

(2) 변경계약내역서        1부.끝.