문서번호	전략산업기반과-4438
결재일자	2021. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		G밸리관리팀장	전략산업기반과장
박광수		代정정은	12/09 오경희
협조

G밸리 창업복지센터 인테리어

공사 및 감리 기간 연장 계획

2021. 12.

신성장산업기획관

(전략산업기반과)

「G밸리 창업복지센터 인테리어」

공사 및 용역 기간 연장 계획

****************************************************************************************************

□ 공사개요

공사명	세부공사	계약자	계약금액(원)		공사기간
			당초	변경	당초	변경
G밸리 창업복지센터 인테리어	건축공사	*******	***********	***********	********* *********	********* *******
	전기공사	******	**********	**********	********* *********	********* *******
	감리용역	*******	*********	**	********** *********	********* *******

□ 공사기간 연장검토

○ ****************************************************************************************

○ *******************************************************************************************

*********************

○ ********************************************************************************************함”을 설명함.

○ ********************************************************************

※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)

공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사

******************************

□ 행정사항

○ 공사 변경계약 의뢰(→재무과)

○ 공사 준공 예정일 : 2022년 2월 7일

붙임  1. 변경계약 합의서 3부.

2. 설계변경 내역서 2부.  끝.