문서번호	시설관리과-23262
결재일자	2021. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정수용	김형식	유명은	12/09 박기용
협 조

「2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)」

설계변경(1회) 심의위원회 개최 계획

2021. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)」

설계변경 심의위원회 개최 계획

『2021년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』에 대한 신규공종 발생과 물량 증·감으로 인한 설계변경(1회) 심의위원회 개최 계획을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요: 밸브교체 및 변실정비 178개소

○ 계약기간: 2021. 6.21. ~ 2021. 6. 30.

○ 계약금액: 금*******************

○ 계 약 자: 레드탑건설 주식회사  대표 설희선

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

(제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정)

□ 설계변경 사유

○ 공사현장 여건 변경에 따른 신규 공종(54건)

- 소화전철거공 외 53개 공종

○ 기타 물량 증 ․ 감에 따른 변경

□ 설계변경 요약

○ 계약금액 변경 내역

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당초	변경
공급가액	***********	***********	****
부가가치세	**********	**********	****
도 급 비	***********	***********	****

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시: 2021. 12. 9.(목) 15:00

○ 장    소: 사업소 3층 회의실

○ 심의내용: 물량 증 · 감 적정성 및 설계변경 타당성 검토

○ 심의위원

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 급수운영팀장 외 시설6급 주무관 4명

- 간  사 : 시설6급 정수용

□ 행정사항

○ 사업소 자체 심의 후 신규공종 및 물량증 · 감에 따른 설계변경 시행

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의 결과서 1부.  끝.