문서번호	설비부-18055
결재일자	2021. 12. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
추한영		문학준	12/09 김호성
협조

『시립마포 실버케어센터 건립 기계설비공사』

승강기 납품기한 연기 검토보고

2021. 12.

도시기반시설본부

설 비 부

『시립마포 실버케어센터 건립 기계설비공사』

승강기 납품기한 연기 검토보고

『시립마포 실버케어센터 기계설비공사』관급 승객용승강기 납품기한을 현장 여건을 고려하여 아래와 같이 변경하고자 보고드림

- 변경사유 : 건축부대공사 작업일정이 `22.3월이므로 후속공정 승강기 납품기한 변경요청

- 납기변경 : 당초 ‘21.12.24. → 변경 ’22.2.28.(66일)

□ 공사개요

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 백범로31길 27(舊, 한국산업인력공단)

○ 규     모 : 지하2층/지상4층 12,271㎡(노유자시설, 수용인원 120명)

○ 공사기간 : `19.04.25. ~ `21.12.24.

○ 공 사 비 : 3,041백만원

○ 시 공 사 : 동화이엔씨(소방), 대정이엔씨(기계1), 금정엔지니어링(기계2), 태성이엔지(가스), 해동건설환경(정화조)

□ 관련근거

○ 납품기한 연기 검토보고(유탑(마실)제21-274호, `21.12.8.)

□ 변경내용

○ 변경사유 : 선행공정 건축부대공사 준공이 3월말이므로 납품기한 변경

○ 변경내용

구 분	변경 전	변경 후	*******	비고
승객용승강기	2020.6.30.~2021.12.24.	2020.6.30.~2022.2.28.	************

※ 계약금액 변경없음

○ 지체상금 : 해당없음(도시기반시설본부 귀책)

○ 건설사업관리기술자 의견

- 당 현장 특성상 건축물 준공과 단지 외곽 건축 준공 일정이 서로 상이하여 단지 외관 건축공사 준공일정에 맞추어 납품기한 연장이 적정한 것으로 사료됨

□ 조치의견

○ 선행공정을 고려한 승강기 납품기한 변경이 적정하다고 판단되므로 총무부에 변경계약을 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.