투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	대영유비텍(주)
(경유)
제목	준공기한 연기 승인회신(2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사)

1. 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE21A-12-19호(2021.12.08.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 준공기한 연기 요청한 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기       공사에 대하여 아래와 같이 승인 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등의 감리      업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2021.9.23. ~ 2021.12.13.

다. 준공기한 연기 승인내용 : 2021년 12월 13일에서 2021년 12월 23일까지 연기

라. 연기사유 : 토목공사(금부빌딩-강서구청 교통행정과) 지연에 따른 공사기간 부족         으로 준공기한 연기.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 12/09 서승완
협조자
시행	기전과-7027	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개