문서번호	설비부-18091
결재일자	2021. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
유영선		문학준	12/09 김호성
협 조

- 시립마포 실버케어센터 건립 전기공사 -

주차관제시스템 납품기한 연기 검토보고

2021. 12.

도시기반시설본부

[설 비 부]

- 시립마포 실버케어센터 건립 전기공사 -

주차관제시스템 납품기한 연기 검토보고

『시립마포 실버케어센터 건립 전기공사』관련 주차관제시스템 납품기한을 현장 여건을 고려하여 아래와 같이 변경하고자 보고드림. **************************************************** *******************************************
		ㅊ
	ㅊ

□ 관련근거

○ *******************************

- ****************************]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 시립마포 실버케어센터 건립 전기공사

○ 공사위치 : 마포구 백범로31길 21

○ 공사내용 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271.16㎡

○ 공사기간 : 2019. 04. 16. ~ 2021. 12. 15.

○ 도 급 비 : ************************************

○ 도 급 자 : *************

○ 감 리 자 : ***********

□ 변경내용

○ 변경사유 : 선행공정인 건축공사 일정 상 주차관제설비(차단기, 무인정산기 등)를 납품기한내 설치가 불가하여 건축공정에 맞추어 납품설치 기한을 변경

○ 변경내용

*****	**** ********	****	****	****	**
**** ***	***************** ******************	*********************	*********************	**********	*********
	***************** ******************	*********************	*********************	*********
	***************** ******************	*********************	********************	*********
	***************** ******************	*********************	*********************	*********

○ 지체상금 : 해당없음(도시기반시설본부 귀책)

○ 건설사업관리기술자 의견

- 당 현장 특성상 건축물 준공과 단지 외곽 준공일정이 상이하여 단지 외곽에 설치 되어야 할 주차관제설비의 납품기한내 설치가 불가하여 건축공사 준공일정에 맞추어 납품기한 연장이 적정한 것으로 사료됨

□ 조치의견

○ 선행공정을 건축공사일정에 맞추어 주차관제시스템 납품기한 변경이 적정하다고 판단되어 계약부서에 변경계약을 의뢰하고자 함

붙임  건설사업기술자 검토 의견서 1부.  끝.