문서번호	도로보수과-11620
결재일자	2021. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
맹우재		윤옥광	12/09 김영철
협 조
	주무관			이이용
	주무관			김영민

『남산3호터널 주변 자동염수살포장치 설치공사』

사고이월 시행계획 보고

2021. 12.

서부도로사업소

도 로 보 수 과

『남산3호터널 주변 자동염수살포장치 설치공사』

사고이월 시행계획 보고

조달(관급)구매 하여 설치중인 남산3호터널 주변 자동염수살포장치 설치공사와 관련하여 납품기한 미도래 및 동절기 배관(굴착)공사 등으로 금년도 완료가 어려운 실정으로 사고이월 하기 위한 검토 보고임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 재난관리기금 재배정 알림

○ 도로관리과-15100호(’21.10.28.)

□ 2021년회계연도 재난관리기금(재난계정) 사고이월 대상사업 제출 안내

○ 안전총괄과-19120호(’21.12.02.)

□ 2021년회계연도 재난관리기금 사고이월 대상사업 제출

○ 도로관리과-16969호(’21.12.07.)

Ⅱ		사 업 개 요

**************************************

**********************************

*****************

*************************************

*********************

*********************

******************

**********************

************************************* ****************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ ‘21.11.3. 조달(관급)구매하여 설치중인 남산3호터널 주변 자동염수살포장치 설치 완료일이 납품요구일로부터 120일로 납품기한(‘22.3.3.)이 미도래하였으며,

□ 동절기 공사로 염수살포장치 노즐 배관설치공사(도로굴착 수반)시 기온 등을 고려하여 배관설치가 필요하며 2022년도 설치완료 및 준공예정으로 내년도 예산집행이 필요.

□ 사고이월 내역

(단위 : 원)

재배정액	원인행위액	사고이월액	비고
***********	***********	***********

Ⅳ		조 치 의 견

□ 상기 사유와 같이 납품기한 미도래 및 동절기 배관설치 등으로 년내 사업완료가 어려운 실정으로 사고이월 하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2021. 12.10. : 사고이월 요청(사업소 → 도로관리과)

□ 2022. 03.03. 한 : 설치완료 및 준공

첨부   1. 2021 회계연도 사고이월 요구서 1부.

2. 사고이월 제출양식 1부.

3. 분할납품 요구서 1부.  끝.