문서번호	수상기획과-7237
결재일자	2021. 12. 9.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	수상기획과장	운영부장
박지정	박인수	12/09 이상이

마곡승강장 설계변경(실정보고) 검토 보고

2021. 12.

수상기획과

「수상콜택시 승강장 위치 조정 공사」

마곡승강장 설계변경(실정보고) 검토 보고

「수상콜택시 승강장 위치 조정 공사」마곡승강장 도교 연결 방식에 대한 도급자 실정보고서를 검토·승인하여 설계변경을 반영 하고자 함

□ 관련 근거

○ 수상콜택시 승강장 위치 조정 공사 실정보고 제출의 건

- 강남건설 제2021-12-01호(2021.12.1.)

○ 과업지시서 제5조에 따른 해당공사의 일부변경이 수반되는 사항

- 부득이 설계변경을 요할 때에는 쌍방이 기술 검토하여 설계 변경

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 수상콜택시 승강장 위치 조정 공사

**********************

****************************************

*****************

□ 실정보고 내용

○ 마곡 승강장 도교 연결 방식 변경

구분	기존 설계	문제점	개선 의견
*** *****	**** ***** ******	*********** ************* ************	************************

- 기존 전망데크에 데크를 연장하여 이용자 승강장 이동 용이

- 콘크리트 기둥에 도교를 연결하여 강성을 높임

- 홍수위에도 도교의 부상으로 시설이용 및 유지보수 가능

○ 설계변경 비교

- 도교 연결부 높이가 1.0m → 2.5m 높아지며,

※ 서빙고 승강장 도교 높이는 3.8m 였음

- 기존 철구조물 계단 및 도교 연결 시설을 콘크리트 기둥 연결로 변경

	⇨
변경 전(하부 도교 연결)		변경 후(상부 도교 연결)

□ 실정보고 검토

○ 실정보고 사유 및 세부 내역서 건설사업관리단 검토 완료

- 수상레포츠통합센터 상주 감리자(토목) 실정보고서 검토

○ 검토의견: 설계변경 사유는 적합, 일부 내역서 조정 필요

구 분		공 사 비(원)		증 감(원)
		당 초	변 경	도급자	검토조정
도급액	공급가액	**********	**********	**********	**********
	부가세	*********	*********	*********	*********
	도급액	**********	**********	**********	**********
총 공사비		**********	**********	**********	**********

□ 보고자 의견

○ ***********************************************************

○ **************************

붙임  1. 도급자 실정보고서 4부.

2. 건설사업관리단 검토 의견서 1부.  끝.