“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 성내1동외 9개동 상수도공사 설계변경(2차) 및 차수별 부기금액 변경시행

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『2021년 성내1동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 계약물량 증,감 사항 및 신규공종 변경사항이 발생함에 따라 아래와 같이 설계변경(2차) 및 차수별 부기금액을 변경시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 2021년 성내1동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자:******************

다. 계약기간: 2021. 6. 14. ~ 2021. 12. 31.(총 공사부기기간:2021.6.14.~ 2022.6.30.)

라. 설계변경 내용: 신공종 발생 및 계약물량 증․감, 차수별 부기금액 변경

마. 설계변경 내역                                                     (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총계약금액	659,093,740	659,093,740	변동없음

바. 차수별 부기금액 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
총 부기금액	659,093,740	659,093,740	변동없음
1차 부기금액	443,000,000	260,139,000	감 182,861,000
2차 부기금액	216,093,400	398,954,740	증 182,861,000

사. 설계변경 사유: 신규공종 및 공종별 계약물량 증,감 발생, 차수별 부기금액 변경

아. 최대이행금액: 금300,000,000원

자. 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,급.배수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비, 시설비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비, 중블록유량계설치

붙임 : 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(2차) 1부

3. 합의서 1부.

4. 1차수 내역서 1부. 끝.

주무관	강희창		시설관리팀장	김주경		시설관리과장	이규희		강동수도사업소장	12/09 김명용
협조자	주무관	권란연
시행	시설관리과-20579	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)541-4	/
전화	02-3146-5197	/전송	02-3146-5239	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(6)