아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문
		서대문구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경(최종-정산) 시행[2021년 도로굴착복구공사(연간단가)]

우리구에서 시행 중인『2021년 도로굴착복구공사(연간단가)』의 설계변경(최종-정산)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 도로굴착복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2021. 3. 2. ~ 12.31.

다. 예산과목 : 토목과, 도로인프라 확충·정비, 도로기능복구, 도로굴착복구공사,

시설비 및 부대비, 시설비[도로굴착복구기금]

라. 설계변경 사유 : 유관기관 관리청 복구요청에 따른 굴착복구물량 증가에 따른 공종별    계약물량 증·감

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
총 공 사 비		713,036,560	712,476,980	감 559,580
도 급 비	공급가액	539,588,182	591,610,000	증 52,021,818
	부 가 세	53,958,818	59,161,000	증 5,202,182
	계	593,547,000	650,771,000	증 57,224,000
관 급 비		119,489,560	61,705,980	감 57,783,580

붙임  1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율검증확인서 1부.

4. 설계변경 사유서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

주무관							양선애			도로굴착팀장					강성무					토목과장					강우균						안전건설교통국장					12/09 代조봉기
협조자				주무관						정진희					계약팀장							이향란					재무과장								박춘식
기획재정국장							강환복
시행			토목과-17493									(						)		접수													(					)
우	03718					서울특별시 서대문구 연희로 248															/			http://www.sdm.go.kr
전화		02-330-1771						/전송			02-330-1615					/	sunae122@sdm.go.kr														/	부분공개(5)