투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(염창나들목 리모델링 공사-1차)

우리부서에서 추진중인 『염창나들목 리모델링 공사(1차)』와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 염창나들목 리모델링 공사(1차)

2. 공사기간 : 2021. 9. 8. ~ 2021. 12. 31.

3. 계약금액 : 344,975,000원

4. 계 약 자 : ㈜청미건설 대표 양국진

5. 준공기한 연기사유 및 내역

가. 사   유 : 하천점용허가 처리절차 지연으로 인한 절대공기 부족

나. 준공기한 연기 내역

공사명	계약기간		비고
	당초	변경
염창나들목 리모델링공사(1차)	2021. 9. 8. ~ 2021.12.31.	2021. 9. 2. ~ 2022. 4. 30.	총차기간 및 계약금액 변경없음

다. 지체상금 : 미부과

라. 귀책사유 : 한강사업본부

붙임 1. 관련 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 변경 합의서 1부.   끝.

	치수과장
주무관	김태규		치수과장	12/09 代이성연
협조자	주무관	조승만
시행	치수과-7670	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0651	/전송	02-3780-0744	/	mgsilang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)