문서번호	총무과-10829
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울공예박물관장
김진균		이남재	12/10 김수정
협조

서울공예박물관 장애인 주차장 등 조성부지 정밀발굴조사 기간연장 계획

2021. 12.

서울공예박물관

(총  무  과)

서울공예박물관 장애인 주차장 등 조성부지

정밀발굴조사 기간연장 계획

서울공예박물관 장애인 주차장 등 조성부지에 시행하는 정밀발굴조사 대상지 인접한 다수 주택 등 주변 여건을 감안하여 조사를 추진하고자, 계약기간을 연장하고자 함

□ 공사개요

○ 용 역 명 : 서울공예박물관 장애인 주차장 등 조성부지 정밀발굴조사

○ 용역비용 : ************

○ 용역기간 : 착공일로부터 20일 이내

○ 용 역 사 : ************

□ 계약변경

○ 연장사유

- `21. 12. 7. 발굴변경허가에 따라 `21. 12. 13. 발굴조사 착수

- 조사 대상지 인접 주택 주민들의 생활불편 최소화를 위한 기간 연장 등

○ 연장내용

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계약기간	’21. 12. 1. ~‘21. 12. 20.	’21. 12. 1. ~‘22. 1. 31.	증42일	총62일
계약금액	************	************	-

□ 향후계획

************************

*********************

붙 임  1. 변경 공정표

2. 합의각서, 준공기한 연기의뢰서 각1부.  끝.