문서번호	급수운영과-23976
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
김동건	정헌석	성기선		12/10 박기용
협 조
	행정관리팀장		박관용
	주무관		류지호
	주무관		손현정

2021년 회계연도 사고이월 보고

(홍익병원교차로~목동역교차로간 장기사용 송배수관 정비공사)

2021. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2021년 회계연도 사고이월 보고

(홍익병원교차로~목동역교차로간 장기사용 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인『홍익병원교차로~목동역교차로간 장기사용 송배수관 정비공사』와 관련 사고이월 사유가 발생되어 보고 드림.

Ⅰ		공 사 현 황

❍ 공 사 명 : 홍익병원교차로~목동역교차로간 장기사용 송배수관 정비공사

❍ 공사개요 : D=100~600mm L=485m

❍ 공사기간 : 2021. 6. 14. ~ 2022. 7. 6.

❍ 계약금액 : *************

❍ 시 공 사 : **************

❍ 공 정 율 : 90%

- 완료공정 : 관로부설 D=100~600㎜, L=435m

- 잔여공정 : 관로부설 D=100~600㎜, L=50m

Ⅱ		예산집행 내역

❍ 예산 과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비, 장기사용 송배수관 정비

❍ 집행 내역                                                    (단위 : 천원)

예산액 (A)	예산현액	배정액	지출원인행위액 (B)	지 출 액 (C)	사고이월액 (D=A-C-E)	집행잔액 (E)
*******	*******	*******	*******	*******	*******	******

※ 집행 잔액 = 낙찰 차액(********)

Ⅲ		사고이월 사유

❍ 원활한 급수공급 및 공사 추진을 위한 추가 공사기간 확보필요

1) 송배수관 정비공사 중 기존관 연결 시 단수없는 공사 및 혼탁수 방지 등 원활한 급수공급을 위한 수계전환이(목동배수지→신정배수지) 필요함

2) 수계전환 가능 2개 관로 중 D500㎜ 관로는 수계전환 중 물 쏠림 및 유속변화로 혼탁수가 발생되어 수계전환이 불가한 실정으로 본부에서 제시한 2안 시행을 위해서는 퇴수시설 및 관세척 등 추가공정이 필요함.

3) 동절기 도로굴착통제(21.12.1. ~ 22.2.28.) 및 수계전환 작업, 잔여공정 시공을 위한 추가 공사기간이 필요함.

	<수계전환 검토 의견>
1) 1안) 목동역 D500㎜ 신정, 목동 경계밸브(다용도밸브)를 활용하여 세척 후 수계전환 2) 2안) 목동역 5번출구 앞 D600㎜ 제수밸브 양단 퇴수밸브 설치, 양천구 신월로 390~목동역 5번 출구 D600㎜에서 분기되는 급수관 이설 후 수계전환 추진 3) 1안)을 우선 적용하고, 차선으로 2안)으로 시행

	관련 규정
▸ 지방공기업법 제30조, 시행령 제24조 ▸ 지방재정법 제50조, 시행령 제58조

Ⅳ		조치 의견

❍ 상기 보고 내용과 같이 금년도에 공사 준공처리가 불가하므로 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 사고이월 요구서 1부

2. 이월사업별 명세서 1부.

3. 지출원인행위 미필 이월명세서 1부.

4. 준공기한 연기검토 방침서 1부.  끝.