문서번호	교량안전과-18824
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
박경민		김귀용	12/10 조현석
협 조
	강구조교량팀장			代이상문
	강남일반교량팀장			代이회진
	주무관			이상문
	주무관			이회진

2021년 동호대교 보수공사

설계변경자문회의 개최계획 보고

2021. 12.

교 량 안 전 과

2021년 동호대교 보수공사

설계변경자문회의 개최계획 보고

『2021년 동호대교 보수공사』설계변경(1회, 정산)에 대하여 단가적용 적정성 등을 객관적으로 검토하기 위한 자문회의를 개최하고자 함

□ 설계변경 자문회의 운영 개선(교량안전과-15132, `20.10.14)

□ 동호대교 보수공사 실정보고(교량안전과-8950, ‘21.06.08)

□ 동호대교 보수공사 제2회 실정보고(교량안전과-11167, ‘21.07.25)

□ 받침장치 교체방안 검토보고(교량안전과-16619, ‘21.11.03)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2021년 동호대교 보수공사

□ 공사기간 : 2021.4.23 ~ 2021.12.28.

□ 총공사비 : ******** *************************

- 당초 : **********************************

□ 공사내용 : 교면 재포장 43.2a, 교량받침 교체 8개소, 후타재 보수 42.7㎡, 신축이음 누수 차단장치 40.8m 등

□ 계약상대자 : (주)윤산씨앤씨 대표 조영석

Ⅲ		설계변경 자문주요내용

□ 직접공사비 기준 5,000만원 상당의 산출내역서에 없는 품목·비목 조정

- 설계변경(1회) 신규 물량 정산

- 추가 신규물량 검토

Ⅳ		설계변경 검토 결과

□ 신규 공종 증감액

(단위 :원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
직접공사비	-	***********	**************

□ 주요공종 물량 변경 내역

주 요 공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증감
보도부 유공관 설치공	개소당(야간)(1.0*1.8)	개소	-	52	증)52
거푸집 설치 및 해체	600*1200*63.5mm	㎡	-	143.2	증)143.2
콘크리트바닥판열화단면제거	야간, 기계,(착암기), 30mm	㎡	-	213.7	증)213.7
상판보수(바닥판 열화단면보수)	야간, MMA보수몰탈(T=30mm)	㎡	-	145.7	증)145.7
상판보수(바닥판 열화단면보수)	야간, MMA보수몰탈(T=50mm)	㎡	-	30.33	증)30.33
상판보수(바닥판 열화단면보수)	야간, MMA보수몰탈(T=70mm)	㎡	-	37.7	증)37.7

Ⅴ		자 문 계 획

□ 자문회의 개요

○ 일    시 : **********************

○ 장    소 : 교량안전과 회의실(3층)

○ 위원구성

- 위원장 : 참석위원 중 호선

- 위  원

**************************************************

***************************************

**************************

□ 자문내용 : 단가 적용 및 변경물량의 적정성, 설계변경 사유의 적정성, 변경 공법의 적정성

Ⅵ		향 후 계 획

□ `21.12.14. : 자문결과를 반영한 설계변경, 변경계약 의뢰

□ `21.12.20. : 준공

붙 임 : 1. 설계변경 자문 내역서 1부.

2. 설계변경 자문회의 개최 사유서 1부.