문서번호	총무과-32440
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임광수		김창중	12/10 김혁
협 조

「2021년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(1회) 검토 보고

2021. 12.

행 정 국

(총무과)

「2021년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」

설 계 변 경(1회)  검 토 보 고

「2021년 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」와 관련 계약물량의 변경(증‧감) 및 신규공종 발생 등으로 설계변경 후 준공(기성)처리하고자 아래와 같이 보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계 변경으로 인한 계약금액의 조정

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준

- 제13장 공사계약 일반조건, 제6절 공사설계의 변경, 제7절 계약금액의 조정

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2021년도 청사 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

ㅇ 공사기간 : 2021.01.01. ~ 2021.12.31.

ㅇ 계약금액 : *******************************

ㅇ 계 약 자 : ***********

ㅇ 공사내용 : 청사 전기시설물 유지보수공사

□ 설계변경 현황

ㅇ 변경사유

- 당초 공사량 추정 물량을 토대로 발주하였으나, 계약기간 중 물량 증‧감과 내역서에 없는 품목‧비목 추가 발생

- 기성대가 지급을 위해 물량 증감 및 신규 품목‧비목 반영한 설계변경 필요

ㅇ 주요 변경 내역

******	**	****		****		*********
		**	******	**	******	**	******
*************	*	***	*****	****	******	****	********
**************	*	**	***	***	*****	***	*******
************	*	***	*****	*****	******	*****	********
************	*	*	*	***	*****	***	*******

ㅇ 계약금액 변경

**	*******	*******	*********	**
***	***********	***********	*	*******

ㅇ 적용단가 협의

- 관련근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건 제7절(계약금액의 조정)

- 합의결과 : 물량 증감 및 감소는 계약단가 적용, 신규비목은 설계변경 당시를 기준으로 선정한 단가에 낙찰률 적용

□ 조치계획

ㅇ 설계변경에 따른 변경계약 의뢰

ㅇ 변경계약 완료 후 준공(기성)

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 2부.  끝.