문서번호	기전과-12841
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
한상원	12/10 代최진일

2021년 교통사망사고 줄이기 교통신호기 공사(사천교서측 외 3개소) 설계 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

서부도로사업소

(기 전 과)

2021년 교통사망사고 줄이기 교통신호기 공사(사천교서측 외 3개소) 설계 변경 검토 보고

2021년 교통사망사고 줄이기 개선사업 교통신호기 공사(사천교서측 외 3개소) 관련 감리 업체에서 제출한 설계 변경 건에 대해 내용 검토 후 그 결과를 보고하고자 함.

□ 관련 근거

○ 2021년 교통사망사고 줄이기 개선사업 교통신호기 공사(사천교서측 외 3개소) 현장 실정보고

–대영GE21A-12-22호(2021. 12. 8.)

□ 공사 개요

○ 공  사  명: 2021년 교통사망사고 줄이기 개선사업 교통신호기 공사(사천교서측 외 3개소)

○ 공사 위치

- 서대문구 수색로 사천교서측 교차로

- 서대문구 연희로 그랜드힐튼호텔 교차로

- 서대문구 연희로 남영아파트앞1(경보) 교차로

- 서대문구 세검정로 홍제교 교차로

○ 공사 내용: 교통신호기 신설 1식

○ 공사 기간: 2021. 10. 21. ~ 2021. 12. 19.

○ 계약 금액: ******************************

○ 계약 업체: *****************

○ 감리 업체: 대영유비텍㈜

□ 설계 변경 내용

○ 변경 예상 금액: *************                  (단위: 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 · 감
공 급 가 액	**********	**********	************
부 가 가 치 세	*********	*********	**********
도 급 비	**********	**********	************

○ 주요 변경 내역

- 사천교서측: 잔여표시기(숫자) 2조 신설

- 그랜드호텔: 잔여표시기(숫자) 2조 신설, 케이블 물량 변경

- 남양아파트: 전원선 인입 가공선로 물량 변경

- 홍제교: 부착대 내역 변경, 기초앙카 규격 변경, LTE 모뎀 삭제

※세부변경내역은 붙임문서 참조

○ 원가계산 증감 내역

No	구 분	현 재 적 용	변 경 내 용	공사금액 변경(개략)
1	주요변경 공사비	계약금액 표기	실정보고에 의한 변동 금액	▲증 \1,297,219
2	각종 보험료 및 퇴직공제부금	설계내역의 요율에 의한 금액 표기	상기 실정보고에 따른 보험료 정산 및 건강, 연금, 퇴직공제부금비, 노인장기요양 보험료 자료 미제출로 인한 감액	▼감 ￦-2,678,443
3	간접비 (기타경비, 일반관리비,이윤 등)	설계내역의 요율에 의한 금액 표기	상기 실정보고 금액에 의한 정산	▼감 ￦-152,215
4	산업안전보건관리비	설계내역의 요율에 의한 금액 표기	증빙자료 제출에 의한 정산	▼감 ￦-183,393
5	고재처리비	설계내역의 공사량에 의한 금액 표기	상기 실정보고에 의한 변동 금액	▼감 ￦-25,788
합 계 금 액 (공급가액)				▼감 ￦-1,742,620

□ 감리단 검토 의견

○ 현장 여건에 따른 물량 변경을 반영하여 설계 변경이 요구 됨

□ 보고자 의견

○ 실정 보고 승인 내용을 바탕으로 한 감리 업체 설계 변경서 검토 결과 그 내용이 타당하여, 설계 변경을 시행하고 준공하고자 함.

붙임  1. 감리 업체 설계 변경서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.