문서번호	도로보수과-11672
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		윤옥광	12/10 김영철
협 조
	주무관			이이용

『2022년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』

조기발주 시행 계획 보고

2021. 12.

서부도로사업소

(도로보수과)

『2022년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』

조기발주 시행 계획 보고

우리사업소 관내 특별시도의 포장상태가 불량한 구간에 대한 긴급 복구 공사를 조기 발주하여 공사의 연속성 확보를 통해 시민 불편을 해소하고 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공하고자 함.

□ 추진근거

○ 도로 일상유지보수공사 조기발주 추진계획

- 도로관리과-17057(‘20.11.09.)호

○ 성질상 중단할 수 없는 사업의 조기 계약의뢰 안내(2022년)

- 재무과-49025(’21.10.29.)호

○ 2022년도 도로 일상유지보수공사 조기발주 예산편성(안)

- 市-도로관리과 유선상(메일) 통보

※ 재배정예산 : 총 2,741백만원(긴급복구 2,341백만원/긴급출동 400백만원)

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2021.01. ~ 12.31.

○ 관리대상 : 특별시도 세종대로 등 71개 노선

구분	노선수	연장(km)	면적(㎢)	비고
중 구	25	39.08	0.855
용 산 구	14	38.02	0.829
서대문구	11	38.99	0.850
마 포 구	14	35.71	0.763
은 평 구	7	33.32	0.805
합 계	71	185.12	4.102

○ 주요공정 및 물량

- 소파포장보수 178a/절삭 후 아스팔트 덧씌우기 39a/공동작업 31hr

- 긴급소파보수(야간) 2,305hr/긴급소파보수(주간) 820hr

□ 추진계획

○ 도로 일상유지보수공사 조기발주 추진계획(市-도로관리과)에 따라 조기 발주

- ’22년 예산 미확정시에도 발주방침으로 계약절차 이행 가능

※ 근거 : 성질상 중단할 수 없는 사업의 조기 계약의뢰 안내[재무과-53873(‘20.10.29.)호]

○ 2022년도 포장도로긴급복구공사는 수시 작업이 용이한 연간단가 공사로 시행

○ 당해 공사는 6개 도로사업소 2021년도 공통대가 및 2021년도 노무비, 유류비, 경비를 반영하여 일상감사 결과에 따라 공사 발주하여 시행

- 고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼(市-건설혁신과)에 따라 주휴수당, 고용개선지원비(보험료 및 고용개선 장려금) 반영

○ 우리사업소 직영반 긴급항구복구로 처리할 수 없는 정비대상에 대해 작업 지시하여 포장도로 긴급복구 시행

- 정비대상 우선순위

‣ 1순위 : 공동 등 긴급민원/2순위 : 120 다산콜 민원 및 도로순찰 결과/3순위 : 타 공사 연계 및 유관기관 요청사항

○ 도로사업소 야간 긴급출동 외주추진 예산(400,000천원)을 당해 공사에 반영하여 시행

- 관련근거 : ’15년 도로함몰, 포트홀 등 도로 및 도로부속물 파손대비 24시간 대응체계 구축 운영계획 보고[도로보수과-4248(‘15.4.28.)호]

- 운영기간 : 2022.02월 중 ~ 12월 말

- 주요내용 : 응답소, 택시ㆍ버스 포트홀 신고, 전화민원, 장마기간 등 응급복구

- 운영방법 : 야간 상시 대기/주간 대기(공휴일 및 주간)

‣ 야간 : 22:00 ~ 06:00(8hr) / 주간 : 09:00 ~ 18:00(8hr)

○ 계약심사, 일상감사 및 전문공사 발주 사전검토 의뢰

- 계약심사 : 추정금액 5억원 이상 일반 공사(토목․건축)이므로 계약심사 대상에 해당

- 일상감사 : 추정가격 10억원 이상 그 외 공사이므로 일상감사에 해당

- 전문공사 발주 사전검토 : 포장전문공사업이므로 사전검토에 해당

○ 입찰방법 : 공개경쟁입찰

- 입찰참가자격 : 건설산업기본법 제8조 및 동법시행령 제7조에 의거 『포장공사업』면허를 등록한 업체 또는『토목공사업』 또는 『토목건축공사업』을 등록한 업체

(지역의무 공동도급으로서 서울시 의외의 업체는 서울시 업체와 49%이상 공동도급 계약을 체결해야 참가 가능)

‣ 근거 : 업역 규제 페지 시행에 따른 업무 협조[건설혁신과-1917(‘21.02.10.)호]

※ 2021년 01월 01일자로 건설산업기본법령 개정에 따라 전문ㆍ종합간 상호시장 진출이 가능하도록 업역규제가 폐지(공사예정금액 2억원 이상)

○ 관급자재 구매

- 당해 공사에 수반되는 아스콘(3종)을 조달청 나라장터에서 제3단자단가계약을 통해 구매

‣ 구매수량 : *****************************************

‣ 소요예산 : ***********

○ 포장도로긴급복구 공사 진행에 따른 수반 공사 및 용역인 노면표시, 폐아스콘 운반 및 처리는 이전비로 편성

① 노면표시공사

- 당해 공사는 6개 사업소 공통대가 및 품셈을 반영하여 별도 발주 시행

‣ 소요예산 : **********

② 폐아스콘 운반 및 처리

- 당해 용역은 6개 사업소 공통대가 및 품셈을 반영하여 용역 발주 및 시행

‣ 소요예산 : ***********

‣ 운반 및 처리 물량 : ************************************

□ 사업비 집행계획

○ 총 소요예산 : 금 2,741백만원

합계	본공사			별도시행
	소계	도급비		관급비	이전비
		긴급복구	긴급출동	아스콘	노면표시	폐아스콘
*****	*****	*****	***	***	**	***

○ 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비(2,341백만원)

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로유지 일상관리, 시설비 및 부대비, 시설비(400백만원)

□ 향후계획

○ 2021.12월 중 : 계약심사, 일상감사 및 전문공사 발주 사전검토 의뢰

○ 2021.12월 말 : 공사발주 의뢰 및 계약

○ 2021.01월 중 : 공사 착공

붙임 1. 설계내역서 1부.

2. 공사시방서 2부.

3. 도로 일상유지보수공사 조기발주 추진 계획 1부.

4. 2022년도 도로유지 일상관리 예산 재배정 계획(안) 1부.

5. 조기 계약의뢰 안내 2부.  끝.