문서번호	전산정보과-11828
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	전산정보과장		요금관리부장
정은화	代정은화		12/10 안병희
협 조

「디지털 서울워터-ON(2단계) 구축」

계약기간 변경 및 예산집행(사고이월) 계획 보고

2021. 12.

상수도사업본부

(전산정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「디지털 서울워터-ON(2단계) 구축」

계약기간 변경 및 예산집행(사고이월) 계획 보고

디지털 서울워터-ON(2단계) 구축 사업 추진시 추가 과업이 발생되어 사업 계약기간 변경 및 예산집행(사고이월) 계획을 보고 드림

Ⅰ		사업개요 및 추진현황

□ 사업개요

□ 사업명 : 디지털 서울워터-ON(2단계) 구축

□ 사업기간 : 2021. 6. 15~ 2021.12.31.

□ 업 체 명 :********

□ 계약금액 :***********

□ 주요 사업내용

‣ 빅데이터 기반 15종 시스템 주요정보 연계․통합․공유 서비스 제공

‣ 위치기반 실시간 정책지도 연계 서비스(관로, 누수, 공사정보, 생산량 등)

‣ 공사, 사고 등 현장상황을 모니터링 하여 의사결정 및 정책결정 지원

‣ 데이터 공동 활용을 위한 메타 표준관리 및 배포, 시각화 변경 지원 등

□ 추진현황 : 공정률(77.4%, 21.11월말기준)

날 짜	추 진 내 용	비 고
21.06.15	디지털 서울워터-ON(2단계) 구축 사업 계약
21.07.09	착수보고회 개최
21.08.31	공정률(26.34%)
21.09.30	공정률(34.7%)
21.10.01	중간보고회 개최
21.10.31	공정률(66%)
21.11.16	중간보고회 보완사항 보고	부본부장,부장
21.11.30	공정률(77.4%)
21.12.06	디지털 서울워터-ON(2단계) 진행사항 보고	부장

Ⅱ		계약변경 및 예산집행 계획

□ 계약변경

□ 변경사유 : 본 사업은 상수도 타 시스템과 연계하여 서비스 하는 사업으로 과업 추진시 사용자 요구사항이 추가로 발생되어 개발을 위한 사업기간 연장이 필요함

□ 변경내용

1) 추가 과업내용 : 2건

◉ 수질자동감시시스템 수질정보분석지원기능[급수운영과]

•내용 : 수질정보에 대한 분석지원기능을 수질자동감시시스템과 연계해서 구현해야하나 해당부서의 사업종료이 22.01.09일 종료됨

종료 이후 프로그램 구현, DB연계 및 테스트기간 필요로 공기 부족

◉ 여의도 아리수혁신지구[계획설계과]

•내용 : 당초에는 여의도지구를 심플지도로 표출하여 서비스하기로 하였으나 업무분석 단계에서 원격계량기, 자동드레인, 수질자동측정기, 유량계 등 위치기반 서비스 및 속성정보 등 개발하는 부분이 있어 추가 개발기간 소요

2) 지체상금 : 미부과[발주청의 추가 과업 요구로 인한 공기 부족]

3) 변경 과업기간

구 분	당 초	변 경	증 감
사업기간	2021.06.15.～2021.12.31	2021.06.15.～2022.02.28	2개월 연장
사업금액	324,000,000원	324,000,000원	변경없음

□ 예산 집행 계획

□ 예산과목 : 행정정보시스템구축,정보화시스템취득비,Seoul Water스마트 상황실 구축

□ 사고이월 내역

(단위:원)

예산과목	계약금액	선금지급액	지출액(예정)	잔액	사고이월액
계	324,000,000	129,600,000	96,000,000	98,400,000	98,400,000
Seoul Water 스마트상황실 구축	324,000,000	129,600,000	96,000,000	98,400,000	98,400,000

Ⅲ		향후 추진일정

□ 추진일정

□ 21.12.09 : 변경계약 의뢰[재무회계과]

□ 21.12.10 : 변경계약에 따른 사고이월 처리[기획예산과]

붙임  1. 변경계약 합의각서 1부.

2. 사고이월명세서 1부.

3. 행정정보시스템 추산액 1부.

4. 행정정보시스템 선금지금액 1부.  끝.