문서번호	도로보수과-11647
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
권은용		12/10 윤옥광
협조
	주무관		이이용

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2021년 도로굴착복구 폐아스콘처리용역

1차(정산) 설계변경 시행계획 보고

2021.12.

2021년 도로굴착복구공사 폐아스콘처리용역

1차(정산) 설계변경 시행계획 보고

우리사업소에서 시행중인 2021년 도로굴착복구공사 폐아스콘처리용역과 관련하여 정산 설계변경 검토사항이 있어 아래와 같이 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 도로굴착복구폐아스콘처리용역-서부

○ 용역기간 : 2021. 3.31 ~ 2021.12.31

○ 시 공 사 : ******************

○ 계약금액 : *************

□ 보고내용

○ 2021년 도로굴착복구공사 폐아스콘처리용역과 관련하여 건설사업관리단(제2권역) 실정보고 및 설계변경요청이 있어, 내용을 검토한 결과 굴착복구 및 도로정비구간 병행에 따른 처리량감소, 도로함몰예방사업 수량증가에 따른 폐기물 처리량 증가등 물량이 변경되어 정산처리 사유가 발생함.

- 용역비 증감

구 분	설계변경 금액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
총용역비	***********	***********	**************
공급가액	***********	***********	**************
부가가치세	**********	**********	**************

- 폐기물 물량 증감

공 종	당초(톤)	변경(톤)	증 ‧ 감
폐아스콘 운반(주간)	**	******	***********
폐아스콘 운반(야간)	*****	********	***********
폐아스콘 처리비(평삭재)	*****	********	***********
폐아스콘 처리비(덩어리)	***	******	***********

- 공사별 폐아스콘 수량

· 도로굴착복구 공사 : *********************************

· 도로함몰예방사업 : *******************************

- 시공물량

○ 관련문서 : 경동-2권역-2021-38(2021.12.07.)호와 관련임.

- 제목 : 도로굴착복구 건설폐아스콘 설계변경 요청

□ 조치계획

○ 상기와 내용과 같이 도로굴착복구공사 및 도로함몰예방에 처리된 폐기물 수량에 따라 정산처리코자함

- 도로굴착복구공사 : ******************

· 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착기금), 도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 도로함몰예방사업 : ******************

· 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 도로함몰예방사업, 시설비 및 부대비,시설비

□ 행정사항

○ 2021.12.14. : 설계변경계약

○ 2021.12.17. : 용역준공

붙임 : 1. 건설사업관리단 설계변경 검토서 및 요청문서1부.

2. 설계변경내역서1부.

3. 합의각서1부.

4. 산출내역(도로굴착복구공사, 도로함몰예방사업) 각 1부.  끝.