문서번호	도로보수과-11621
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
조문석		代송광석	12/13 이규상
협조
	주무관		송광석

설계변경(2회,최종) 검토보고

[2021년 관내 불량맨홀 정비공사(연간단가)]

2021. 12.

동부도로사업소

(도로보수과)

설계변경(2회,최종) 검토보고

[2021년 관내 불량맨홀 정비공사(연간단가)]

우리 사업소에서 시행중인『2021년 관내 불량맨홀 정비공사(연간단가)』관련, 시공물량 증․감 등에 따른 제2회 설계변경 내역을 검토하여 보고 드림

1		공사개요

○ 공 사 명: 2021년 관내 불량맨홀 정비공사(연간단가)-동부

○ 공사기간: 2021. 5. 11. ~ 2021. 12. 21.

○ 정비물량: 불량맨홀 582개소

○ 도 급 비: *******************************

○ 도 급 자: ㈜평강산업개발 대표 변문수

2		설계변경 사유 및 내용

□ 설계변경 사유

○ 불량맨홀 정비 물량 변경(주․야간 시공물량 변경)에 따른 기 계약공종 물량조정(증․감) 시행***********************

○ 맨홀뚜껑 및 틀 교체에 따른 맨홀운반 물량조정(증․감) 시행[********************]

○ 불량맨홀 정비물량 변경에 따른 폐기물 물량 반영*********************

○ 맨홀 식별 표시 공사비 반영*******

○ 주요 수량 증감내역

공 종	단 위	수 량		증․감	비고
		당 초	변 경
불량맨홀보수공	개소	***	***	******
맨홀운반	횟수	***	**	******
집하장상차	톤	***	***	******
식별표시	개수	*	***	******

□ 공사비 변경 내용

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
총 공 사 비		***********	*************	***************
도급비	공급가액	***********	*************	**************
	부가가치세	**********	***********	**************
	계	***********	*************	**************
이 전 비		**********	**********	***************

3		조치계획

○ 시공물량 변경에 따른 부족예산은 낙찰차액(노후포장도로 정비공사) 및 추가예산(도로굴착복구) 사용

- 예산과목

․ 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

․ 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 설계변경 및 재계약 요청(도로보수과→관리단속과)

붙임: 1. 계약(변경) 내역서 1부.

2. 설계변경(제2회,최종) 사유서 1부.

3. 검증확인서 1부.

4. 닉찰차액 및 집행잔액 사용 계획 보고 1부.  끝.