문서번호	도로보수과-11085
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
황태선		김순수	12/13 고영준
협조

『2021년 노후포장도로 노면표시 설치공사(2구역)』

설계변경(2회, 정산) 검토보고(수정)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  12.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 노후포장도로 노면표시 설치공사(2구역)』

설계변경(2회, 정산) 검토보고

우리사업소에서 시행중에 있는『2021년 노후포장도로 노면표시 설치공사(2구역)』관련 공사 추진에 따른 설계변경(2회, 정산) 검토보고 임.

		공사개요

❍ 공 사 명 : 2021년 노후포장도로 노면표시 설치공사(2구역)-북부

❍ 공사기간 : 2021.04.22.~2021.12.31

❍ 공사규모 : ************

❍ 공 사 비 : **************************************

❍ 시 공 사 : ************

****************************

		설계변경 사유

❍  물량 증·감에 따른 수량 변경

▶ 노후포장도로 정비공사 물량 변경에 따라 공종별 수량조정

		주요 변경내용

❍ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 금 액			비고
		당 초	변 경	증·감
총공사비		***********	***********	*************
도급비	공급가액	***********	***********	*************
	부가세	**********	**********	*************
	도급액	***********	***********	*************
관 급 비		***********	***********	*************

❍ 주요공정 변경내역

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
차선 도색 (백색, 5종)	백색 15cm	m	*****	******	********
차선 도색 (황색, 5종)	황색 15cm	m	******	******	********
차선 도색 (백색, 4종)	백색 15cm	m	******	******	********
차선 도색 (황색, 4종)	황색 15cm	m	*****	*****	********

❍ 관급자재 변경내역

품명	규격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
노면표지용페인트	5종, 흰색	조	***	**	*****
노면표지용페인트	5종, 노란색	조	***	***	*****
노면표지용페인트	4종, 흰색	포	*****	*****	*****
노면표지용페인트	4종, 노란색	포	***	***	*****

- 예산과목

· (도시개발특별회계)안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리. 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

		검토결과

❍ 건설사업관리기술자 검토의견

▶ 2021년 노후포장도로 노면표시 설치공사(2구역)과 관련하여 설계변경 서류 검토 결과 시공물량 증·감 사항이 적정

❍ 공사 담당 검토의견

▶ 상기 건설사업관리기술자 검토의견을 반영하여 시공물량 정산에 따라 설계변경 시행이 필요함

		조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 변동 분 차선도색 시공물량 증·감에 대해 설계변경(2회,정산)을 시행하고 변경계약 및 준공을 하고자 함.

붙임  1. (감리단)설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경(2회) 내역서 1부

3. 설계변경(2회) 사유서 1부.

4. 물량(정산) 수량표 1부.

5. 설계변경(제비율) 검증 확인서 1부.  끝.