투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 토건시설물 정비공사(연간단가) 설계변경 시행

1. 시설과-7511호(2021. 12. 13.)관련입니다.

2.『2021년 토건시설물 정비공사(연간단가)』제2차 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 토건시설물 정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2021. 5. 3. ~ 2021. 12. 31.

다. 공사개요 : 노후 토건시설물 정비(징크지붕 설치 2개소 300㎡, 데크바닥 설치 95㎡ 등)

라. 계 약 자 : **************

마. 계약금액 : 금380,757,750원

바. 설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공 급 가 액	금 346,143,409원	금 388,509,091원	증 42,365,682
	부가가치세	금 34,614,341원	금 38,850,909원	증 4,236,568
	계	금 380,757,750원	금 427,360,000원	증 46,602,250

사. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 월드컵공원 시설물 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비

아. 변경사유 : 작업지시에 따른 물량 변경 및 보험료 정산 등

첨 부 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

주무관	정종광		토건시설팀장	송석주		시설과장	代고봉채		서부공원녹지사업소장	12/13 代류기혁
협조자	재무팀장	양근대
시행	시설과-7510	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	300-5569	/		/	부분공개(5)