문서번호	정수과-3833
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이승열		김경희	12/13 신동호
협 조
	주무관			류혜영

입상활성탄(신탄) 구매(2차년도) 예산 사고이월 보고

2021. 12. 13.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

입상활성탄(신탄) 구매(2차년도) 예산 사고이월 보고

입상활성탄(신탄) 2차년도 변경계약(납품기한 연장)에 따라 구매

예산을 사고이월 하고자 다음과 같이 보고합니다.

□ 사업 개요

○ 건    명 : 강북아리수정수센터 입상활성탄(신탄) 구매(장기계속)

○ 계약업체 : ㈜삼진이앤알 등 4개 업체

○ 계약물량 : 7,830㎥(총 36지)

○ 추진기간 : 2020.2월 ~ 2022.12월

- 1차년도 : 2020.2월 ~ 2020.12월

- 2차년도 : 2021.1월 ~ 2021.12월

- 3차년도 : 2022.1월 ~ 2022.12월

○ 소요예산 : 12,069,000천원

□ 그간 추진현황

○ 2020.12월 : 1차년도 납품완료 : 2,610㎥(12지 물량)

○ 2021.1월 : 계약변경(1차)

- 변경내용 : 금액 및 물량 변경

구 분		구매비(천원)	계약물량	납품 기간	변경내용(천원)
총 계	전	12,069,000	7,830㎥(36지)
	후	12,069,000	7,830㎥(36지)
1차 납품	전	4,023,000	2,610㎥(12지)	’20.2.~12.31.	납품 완료
	후	4,023,000	2,610㎥(12지)	’20.2.~12.31.	납품 완료
2차 납품	전	4,023,000	2,610㎥(12지)	’21.1.1.~12.31.
	후	2,682,000	1,740㎥(8지)	’21.1.1.~12.31.	감1,341,000
3차 납품	전	4,023,000	2,610㎥(12지)	’22.1.1.~12.31.
	후	5,364,000	3,480㎥(16지)	’22.1.1.~12.31.	증1,341,000

- 변경 사유 : 본청 계약부서 착오(물품계약서 규격 및 단위 착오 입력)

□ 변경계약(2차) 추진

○ 변경내용 : 납품기한 연장

구 분		구매비(천원)	계약물량	납품 기간	변경내용
총 계	전	12,069,000	7,830㎥(36지)
	후	12,069,000	7,830㎥(36지)
1차 납품	전	4,023,000	2,610㎥(12지)	’20.1.1.~12.31.	납품 완료
	후	4,023,000	2,610㎥(12지)	’20.1.1.~12.31.	납품 완료
2차 납품	전	4,023,000	2,610㎥(12지)	’21.1.1.~12.31.
	후	2,682,000	1,740㎥(8지)	’21.1.1.~’22.6.30.	납품기한 6개월 연장
3차 납품	전	4,023,000	2,610㎥(12지)	’22.1.1.~12.31.
	후	5,364,000	3,480㎥(16지)	’22.1.1.~12.31.

○ 변경사유

- 호주산 석탄 수입 금지 조치에 따른 중국 내 석탄량 공급 감소

- 중국 내 석탄생산량 대부분 전력량으로 소모하여 활성탄용 석탄 수급 어려움

- 세계적인 탄소 중립 정책 및 2022년 동계올림픽 개최에 따른 중국 정부 대기오염방지정책에 일환으로 석탄 사용 산업 제한

□ 사고이월 검토

○ 우리 센터와 계약된 공급업체가 위의 사유로 물량 확보에 어려움이 있으며,

○ ’21년내 반입되어도 고도증설공사 물량 우선 투입으로 인해 본 건(구매)은 ’22년 수온 하강기(’22년 11월 전·후)에 교체 공사가 가능하여 활성탄 장기간(1년) 보관으로 파손 및 성능 저하가 우려됨

⇒ 이에 따라 사고이월하여 사업을 적정 추진하고자 함

□ 사고이월 금액

○ 2차년도 예산 : 2,682,000천원(기지급 : 1,072,800천원)

○ 사고이월 금액 : 1,609,200천원.

□ 향후 조치 계획

○ 납품기한 연장(2022.6월말) 및 사고이월 조치하여 입상활성탄 구매 완료

○ 사고이월 및 공사기간 변경 계약 의뢰(행정관리과).  끝