문서번호	시설보수과-4357
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
박종석		김정선	12/13 조선행
협조

슬러지처리분야 공동구 노후설비 개선공사 정산보고

2021. 12.

난지물재생센터

시설보수과

슬러지처리분야 공동구 노후설비 개선공사 정산보고

센터의 “슬러지처리분야 공동구 노후설비 개선공사” 감독 수행 중 준공

정산처리를 하고자 아래와 같이 보고드림

1		관련근거

❍ 공사준공 및 인계(서울시설공단 공사감독3처-13567호,2021.12.10.)

2		공사개요

❍ 공 사 명: 슬러지처리분야 공동구 노후설비 개선공사

❍ 도급업체: *****************

❍ 계약금액: ***************************

❍ 공사기간: 2021.07.16. ~ 2021.01.11.

❍ 공사개요: 지하 공동구내 노후설비 및 배관 교체

2		정산보고

❍ 제경비 및 고용개선지원비의 제출서류 검토결과 정산처리

- 보험료 실비 정산(건강보험료, 노인장기요양 보험료, 연금보험료)

- 건설장비대여료, 전자인력시스템 단말기, 고용개선지원비

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계	31,959,248원	9,654,950원	감 22,304,298원	부가세제외
건강보험료	5,891,018원	3,917,820원	감 1,973,198원
노인장기요양보험료	678,645원	451,180원	감 22,465원
연금보험료	7,728,741원	4,020,970원	감 3,707,771원
건설장비대여료	384,931원	64,980원	감 319,951원
전자인력시스템 단말기	1,500,000원	1,200,000원	감 300,000원
고용개선지원비	15,775,913원	0원	감 15,775,913원

❍ 정산내역

3		계약금액 조정

공 종	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비 고
계	592,620,000원	566,720,000원	감 25,900,000원
도 급 비	538,745,455원	515,200,000원	감 23,545,455원
부 가 세	53,874,545원	51,520,000원	감 2,354,545원

❍ 계약변경 금액(제경비포함)

구 분			당 초	변 경	증·감 액	비 고
순공사원가	재료비	직접 재료비	212,662,573	212,662,573	0
		소 계	212,662,573	212,662,573	0
	노무비	직접 노무비	171,749,806	171,749,806	0
		간접 노무비	22,327,474	22,327,474	0
		소 계	194,077,280	194,077,280	0
	경 비	경 비	518,623	518,623	0
		소 계	518,623	518,623	0
	제경비	산재 보험료	7,180,859	7,180,859	0
		고용 보험료	1,688,471	1,688,471	0
		건강 보험료	5,891,018	3,917,820	감 1,973,198
		노인장기요양보험료	678,645	451,180	감 227,465
		연금 보험료	7,728,741	4,020,970	감 3,707,771
		퇴직공제부금	3,950,245	3,950,245	0
		산업안전보건관리비	10,200,000	10,200,000	0
		기 타 경 비	23,590,911	23,590,911	0
		건설장비대여료	384,931	64,980	감 319,951
		소 계	61,293,821	55,065,436	감 6,228,385
순공사원가 합 계			468,552,297	462,323,912	감 6,228,385
일 반 관 리 비			22,021,957	21,729,224	감 292,733
이 윤			40,276,163	39,327,740	감 948,423
전자인력시스템 단말기			1,500,000	1,200,000	감 300,000
고용개선지원비			15,775,913	0	감 15,775,913
고 재 처 리 비			-9,380,875	-9,380,875	0
도 급 액			538,745,455	515,200,000	감 23,545,455
부 가 세			53,874,545	51,520,000	감 2,354,545
합 계			592,620,000	566,720,000	감 25,900,000

- 계약변경 세부내역

4		향후계획

❍ 위 변경 사유와 같이 도급업체와 변경(준공정산) 계약을 하고자 함

❍ 행정사항

- 관리과에 변경계약 요청

붙 임: 1.시설관리공단 공문 1부.

2.준공(정산)내역서 1부.

3.제경비관련 제출 서류 1부.

4.합의각서 1부. 끝.