문서번호	도로보수과-11722
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
권은용		12/13 윤옥광
협조
	주무관		이이용

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2021년 도로굴착복구노면표시설치공사-서부  (제1회, 정산)설계변경시행계획 보고

2021.12.13.

2021년 도로굴착복구공사 노면표시 설치공사

1차(정산) 설계변경 시행계획 보고

우리사업소에서 시행중인 2021년 도로굴착복구공사 노면표시 설치공사와 관련하여 정산 설계변경 검토사항이 있어 아래와 같이 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로굴착복구노면표시설치공사-서부

○ 공사기간 : 2021. 3.31 ~ 2020.12.31

○ 시 공 사 : ***************

○ 도 급 비 : *************

□ 보고내용

○ 본 공사인 도로굴착복구공사(연간단가)에서 복구한 노면표시 시공물량의 감소에 따라 정산 시행하고,

○ 2021년 도로굴착복구 노면표시 설치공사 발주시 노면표시 복구물량이 소량으로 도로함몰예방사업을 포함하여 시행하였으며, 서울시가 요청한 공동조사 및 복구 물량의 증가에 따른 설계변경 사유가 발생함.

- 공사비 증・감

구 분	변경금액(원)		증・감	비 고
	당 초	변 경
총공사비	***********	***********	*************
도 급 비	***********	***********	*************
관 급 비	**********	**********	************

- 시공물량 증・감

공 종	시공물량(m)		증 ‧ 감(m)
	당 초	변 경
백색 실선 및 파선	******	******	********
황색 실선 및 파선	******	******	********
청색,분홍색 실선 및 파선	*****	*****	********
횡단보도 및 문자기호	******	******	********
합 계	******	******	********

- 공사별 노면표시 수량

· 도로굴착복구 공사 :****************************

· 도로함몰예방사업 : **************************

□ 조치계획

○ 상기와 내용과 같이 도로굴착복구공사 및 도로함몰예방에 수행된 노면표시 수량에 따라 정산 처리코자 함

- 도로굴착복구공사 : *****************

· 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착기금), 도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 도로함몰예방사업 : ****************

· 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 도로함몰예방사업, 시설비 및 부대비,시설비

※도로함몰예방사업 총 증액분은 도급비 7,674,040원 관급자재비 1,878,240원 합계임

□ 향후계획

○ 2021.12.15. : 설계변경계약(제1회, 최종)

○ 2021.12.17. : 공사준공

붙임 : 1. (제1회, 정산) 설계변경내역서1부.

2. 계약조정금액 검증확인서1부.

3. 산출내역(도로굴착복구, 도로함몰예방) 각 1부.  끝.